함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역 설계변경 시행(전체 8회, 7차 1회)

우리 본부에서 시행중인『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역』(전체 8회, 7차 1회)에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리(CM)용역

나. 용역개요 : ‣ 기존 정수처리시설 철거 25만톤/일

‣ 시설현대화(성능개선) 70만톤/일

‣ 고도정수처리시설 60만톤/일(오존+입상활성탄)

다. 용역기간 : 2009.05.25. ~ 2016.12.31.(총괄)

2014.12.26. ~ 2015.12.31.(7차분)

라. 계약금액 : 6,547,420,000원(총괄)

1,039,000,000원(7차분)

마. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산, 건설중인자산, 시설비 등, 감리비

바. 계 약 자 : ㈜도화종합기술공사 외 1개사

사. 설계변경 내역

1) 전체분(8회)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	공급가액	5,952,200,000	6,023,790,909	71,590,909	물가변동에 의한 도급비 증
	부가세	595,220,000	602,379,091	7,159,091
	계	6,547,420,000	6,626,170,000	78,750,000

2) 7차분(1회)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	공급가액	944,545,455	944,545,455	-	금액변동 없음
	부가세	94,454,545	94,454,545	-
	계	1,039,000,000	1,039,000,000	-

아. 설계변경 사유

◦ 계약금액 조정결과에 따른 업무지시[고도정수반-1134(2015.02.27.)]

1) 물가변동 시점

- 기준시점(직전조정일) : 2011.01.01.

- 비교시점(조정기준일) : 2015.01.01.(기간경과 : 1,461일)

2) 물가변동(상승)율 : 3.99%

붙 임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 검토 통보문 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.

4. 변경내역서(전체분, 8회) 1부.

5. 변경내역서(3차분, 1회) 1부. 끝.

주무관	송병욱		고도정수반장	김인규		시설안전부장	강신재		상수도사업본부부본부장	03/05 고인석
협조자	주무관	최명삼		주무관	김성민		재무회계과장	조두업
기획예산과장	최생인
시행	고도정수반-1293	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1435	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개