문서번호	자연생태과-3896
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
이정호	양경규	03/05 최현실

물순환생태계류 사업대상지 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

푸른도시국

(자연생태과)

물순환생태계류 사업대상지 변경

관악구의 사업대상지 변경요청 사항 검토에 따른 대상지 변경으로 사업추진에 만전을 기하고자 함

추진근거

2015년 물순환 생태계류 조성사업 [자연생태과-776호(2015. 1. 13)]

사업추진 계획(2015)

위    치 : 관악구 난향동 산93-1 일대

사업내용 : 계류정비1, 생태보2개소 조성, 수목식재 등

소요예산 : 25백만

사업대상지 변경

구 분	위 치	사업내용	소요 예산액
당초	난향동 산93-1 일대	계류1(호안정비) 생태보2개소	25백만원
변경	남현동 산64 일대	계류1(호안정비) 생태보2개소

※ 물순환생태계류 변경대상지

남현동 산64 일대

변경사유

당초 계획하였던 난향동 산93-1 일대는 기존 사업대상지는 사유지가 일부 포함되어 해당 토지주의 토지사용 반대로 사업시행이 불가

변경대상지인 남현동 산64 일대의 경우, 기존 폐쇄된 약수터가 있고 전 구간이 국유지이며 주변 주민들의 통행이 빈번한 장소로서, 계류 정비, 생물서식공간 조성 및 주변경관 환경개선이 필요한 지역임

검토결과

변경대상지는 폐약수터로써 인근 주민들의 산책로로 많이 이용되고 있고,   우천시 계곡부 사면 토사유출이 심하며 생물서식공간 조성을 위한 생태계류 정비 및 생태보 설치가 적합한 곳으로 판단되어 사업대상지로 변경

향후 추진일정

2015. 5      : 변경대상지 설계심의 및 계약심사

2015. 5 ~ 6 : 공사착공 및 준공

행정사항

해당 시행기관에 사업대상지 변경 승인 및 예산 재배정.  끝.