문서번호	방재시설부-2967
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	03/05 임춘근
협조
	주무관		김달용

「경의선숲길 공원조성공사」 - 연남동구간

전주 · 통신선로 지중화사업 추진 현황 보고

2015. 3

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』 - 연남동구간

전주·통신선로 지중화사업 추진 현황 보고

「경의선숲길 공원조성공사」 연남동 구간 전주·통신선로 지중화사업 추진 현황 보고임.

Ⅰ

현 황

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성 연남동 구간 한전·통신 지중화 사업

○ 위    치 : 마포구 동교동 147-89 ~ 연남동 375-100 일대

○ 규    모 : 간선 · 지선 총 연장 2,373m, 면적 3,104㎡

- 한전주 및 관로포설 상세 내용

· 한전주 51본

· 간선 : 연장 1,286m, 면적 1800.4㎡

· 지선(골목길) : 연장 1,087m, 면적 1304.4㎡

· 패드변압기 9대/ 개폐기 5대

· 맨홀 총 41조

○ 사업기간 : ’2014. 4. ~ ’2015. 5.

○ 사 업 비 : 4,294백만원(서울시·마포구 / 한전·통신 각각 50%씩 분담)

Ⅱ

지중화 추진 현황

□ 지중화사업 진행절차

한전 통신 지중화		사유지 보상 및 각 가정 통신선 인입		지중화구간 도로포장 및 공원 내 전주 철거
· 14.5~8 : 지중화사업 협약체결 (마포구↔한전·통신사업자) · 14.11 : 지중화공사 착공 · 14.12 : 한전 및 통신사 맨홀 및 주관로 포설		· 지선(골목길)구간 사유지 보상협의 · 각 세대별 전기 및 통신선 휴전 및 연결 협의(약 100세대) · 지선(골목길)구간 관로포설 · 각 세대별 전기 및 통신선입상		· 지중화구간 도로포장 · 경의선숲길공원 내 전주 철거 및 공원 정비

□ 공사 추진 일정

- 2014. 11~12 : 1-2단계 도로 굴착 및 관로 포설 완료

- 2015. 1 ~ 3 : 지선(골목길) 사유지 구간 점용협의 (마포구)

- 2015. 3 ~ 4 : 지상기기설치, 간선·지선 관로 포설 (한전, 통신사)

- 2015. 5 : 선로가압 및 고압·저압 인입선 지중전환

가공선로 철거 및 전주철거  (한전, 통신사)

- 2015. 5 : 전주 철구 구간 포장 및 식재복구 (도기본)

□ 문 제 점

- 지중화 지선(골목길)구간 일부가 사유지로 현재 소유자와 점용 협의중이며      각 세대별 전기 휴전 및 통신선 연결에 대한 협의도 진행 중

(당초 지중화공사 공정상 2월까지 사유지 협의 완료 예정)

- 공원 준공 계획 공정상 공원 내 전주 철거가 3월말까지 완료되어야 하나     지선구간 관로포설 및 각 세대별 통신선 연결까지 상당한 시간이 걸릴 것으로     예상되며 각 가정 통신선 연결이 완료되어야 공원 전주 철거가 가능함.

□ 조 치 계 획

- 지중화사업 및 정비 조속 완료 촉구 (마포구, 한전)

- 한전주 철거 지연 대비 공원 마무리 계획 검토 지시 (건설기술관리단)

붙  임 : 경의선숲길 연남동구간 지중화 관로포설 현황 1부.  끝.