문서번호	시설과-1432
결재일자	2015.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	공헌구	심상원	03/06 안영노
협 조
	주무관		한상길

「안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성」

조절저수지 보수·보강 추진계획

2015년 3월

( 시 설 과 )

「안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성」

조절저수지 보수·보강 추진계획

서울대공원 주요 기반시설인 조절저수지의 안정성 확보를 위해  노후·불량 시설물에 대하여 보수·보강을 실시 안전한 대공원 조성에 만전을 기하고자 함.

□ (서울대공원 중.단기 발전 전략과제 8번 안전과 편의 시스템 구축)

Ⅰ		사업근거

○ 서울대공원 조절저수지 정밀안전진단용역 결과 (D등급판정)

○ 대공원 혁신위원회 시설개설사업 세부추진계획 (시설과-240호, 2015.1.14.)

Ⅱ		시설현황

○ 시설규모

시설명	종별	준공 연도	댐 형식	높이 (m)	길이 (m)	저수량 (㎥)	면적 (㎡)	최고수심 (m)	안전 등급
조절 저수지	법정외	1984년	필댐 토석재료를 완만한 기울기로 쌓아올려 만든 본체의 자중(自重)에 의하여 저수(貯水)에 의한 하중을 지탱하는 형식의 댐 2) 제방 또는 댐의 본체	50	100	219,240	23,055	20	D

○ 주요기능 : 집중호우 시 홍수피해 예방 및 동물사육 공급용수 사용

○ 유지관리 실태

- 축조된 지 30년 되어 부분적인 노후화 진행과 댐체 하류부 용출 현상으로 2014년에 정밀안전진단과 긴급으로 시설물 일부 제체 에 대하여 보수‧보강 조치 완료

위치도	항측도	저수지 상류

Ⅲ		추 진 방 향

○ 전문기관인 한국농어촌공사에 기본 및 실시설계 용역 위․수탁 의뢰

- 수문학적 안정성을 위하여 여수로 증고 및 확대 설계

- 상류부 취수시설 설치 방법 결정(취수탑 또는 통관) 및 설계

- 구조물 보수･보강공법 등 공사방법 선정

○ 용역 결과에 따라 보수·보강 사업 범위 결정 및 시행(자체감독)

Ⅳ		2015년 추진계획

○ 사업개요

- 취수시설 설치 :  취수탑(사통) 1개소

- 여수로 확장 :  L형 옹벽 설치(L=120m) 및 기존 슬래브 철거

- 시설물 보수 ․ 보강 : 조절부, 급류부, 감세부, 방수로, 하부웨어 단면보수 등

○ 사업비 : 1,243,000천원

- 실시설계 용역   :      78,480천원

- 보수·보강 공사 : 1,164,520천원

○ 추진일정

- 2015.   3월 : 위․수탁 의뢰(한국농어촌공사)

- 2015.   7월 : 기본 및 실시설계 용역(한국농어촌공사)

- 2015.   8월 : 계약심사 및 보수․보강공사 발주

- 2015.   9월 : 구조물 보수·보강 공사 시행

- 2015. 12월 : 공사 준공

Ⅴ		기대효과

○ 조절저수지 주요 시설물의 내구성 확보로 대규모 홍수피해 예방

○ 동물사육에 필요한 용수 안정적 공급으로 예산절감. 끝.