함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보(길음교 송배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-1956(2015.04.09)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『길음교 송배수관 정비공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

연번	공단보고내용 및 검토의견	사업소 검토의견	비고
1	- 횡단굴한 바, 작업구 설치위치에 기존관 보호콘크리트가 타설되어 있으며,작업구 설치를 위한 보호콘크리트 깨기 작업시 기존관(∮600,∮800)파손우려가 큰 실정임 - 배기변과 교대부 사이를 횡단굴착한 바, 관상부 심도가(2.7m)가 깊고 교대부와 인접되어 작어구 설치가 어려운 실정임	- 검토 의견대로 종점부 작업구 위치를 C위치에 설치하고 향후 설계변경시 반영토록하고, 작업구 설치시 공사장 안전관리에 철저 - 시점부 작업구는 배기변을 포함한 A위치에 설치하여 향후 설계변경시 반영토록 할 것.

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		주무관	한상근		시설관리과장	03/06 나태산
협조자
시행	시설관리과-5867	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	대시민공개