문서번호	정수과-912
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
이병옥		김영배	03/09 유성종
협조
	정수시설과장		남효돈

「활성탄흡착지 1계열 유입배관 누수복구 관련」

고도정수처리 생산중단 계획

2015. 03. 09

암사아리수정수센터

정 수 과

「활성탄흡착지 1계열 유입배관 누수복구 관련」

고도정수처리 생산중단 계획

활성탄흡착지 1계열 유입배관 누수보수 작업과 관련하여 정수처리공정 및 수질관리계획 등 생산중단계획을 수립추진하고자 함

□ 추진개요

○ 공사일정

※ 공사일정은 정수처리공정 등 현장여건에 따라 다소 변경될 수 있음

작업(예정)일시	고도생산중단일	대 상
‘15.03.09(월) ~03.14(토)	6일	활성탄지1계열

○ 공사내용

작 업 일	작업내용	비 고
3월 09일	전기선 및 양수기 설치	고도생산중지(활성탄지1계열)
3월 10일	양수작업
3월 11일	양수작업
3월 12일	용접기 및 배풍기 설치
3월 13일	용접작업
3월 14일	용접 및 내부 청소작업	고도생산

○ 공사위치

□ 근무조 편성 및 임부부여

○ 운영관리 총괄 : 정수과장(부:이병옥)

○ 공사진행 총괄 : 정수시설과장(부:서영호)

○ 사전준비

- 누수보수 작업계획 검토 및 현장 확인(서영호)

- #3·4계열 여과지 수로 후염소투입배관 점검(김재홍, 정광필)

- 표준공정 및 고도공정 전환용 밸브 작동상태 점검(이병옥, 서홍교)

○ 현장관리, 수질관리 및 제어·현장확인

추진업무	담당자
#3.4계열 여과지수로 후염소 투입	김재홍, 정광필
#3.4계열 표준공정 정수변 밸브조작	중앙제어실 근무자
오존투입 밸브조작	정철웅
#3.4계열 고도공정 밸브조작	중앙제어실 근무자
오존접촉조 전단 유입밸브조작	중앙제어실 근무자
현장관리 및 진행상황 현장확인	서영호, 이병옥, 서홍교

□ 공사에 따른 운영방안

○ 1정수장 3·4계열 –전량 표준정수처리

○ 1정수장 1·2계열 –전량 고도정수처리

○ 2정수장 1·2계열 –전량 고도정수처리

○ 공사완료후 고도정수 운영방법

-  휴지중인 활성탄지를 지별 30분 세척후 순차적으로 통수

-  전량 통수후 3·4계열 여과지 수로 후염소 투입중지

붙임 1. 활성탄흡착지 누수보수 작업계획서 1부

2. 활성탄지 중지 및 가동 설명서 1부.  끝.