문서번호	시설보수과-1852
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		박병연	03/09 조병준
협조

현장 실정보고서 검토 보고

(2014년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고서 검토 보고

“2014년 개봉고가차도 보수공사” 관련,  감독기관인 시설관리공단의 현장 실정보고서 제출에 따라 검토 보고 후 처리하고자 합니다.

▷ 관련문서: 시설관리공단 공사감독1처-2184호, 2183호 (‘15.3.6)

“보도부 가드레일판 추가 도장, 크레인(트럭) 규격 및 사용일수 조정”

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2014년 개봉고가차도 보수공사-강서”

공사기간 : 2014.9.22 ~ 2015.3.20.

공사개요

○ 포장보수공 : 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부(방수) 재포장 10a

○ 콘크리트보수공 : 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m

○ 배수시설정비공 : 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소, 교량배수구 관세정 370m, 배수구 구멍뚫기 43개소

○ 기타보수공 : 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m, 슈청소공 82개소, 케이블보호용덮개보수 72개소

○ 부   대   공 : 공간비계설치 1,725㎡, 보호막(분진·방진망) 설치 1,897㎡, 가설사무실·창고, 트럭크레인(10톤) 480HR 등

도 급 비 : 1,145,350,430원 (관급비 44,163,700원,  이전비 11,400,00원 별도)

계 약 자 : 미래건설기술(주) 대표 염일영

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항

1

《보도부 가드레일판 추가 도장》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 개봉고가 보도는 상행선(광명→서울방향)에 설치되어 있으며, 보차도 경계부에 가드레일이 설치되어 있음.

- 당초 설계서상 가드레일판 강재도장은 앞면(차도측)만 도장하도록 되어있으나, 기존 가드레일판 뒷면(보도측) 및 지주의 도장부 녹발생 및 들뜸 현상으로 재도장이 필요한 실정임

※ 기존 가드레일(보도측) 현황

기존 가드레일판(보도측) 현황 – 뒷면(보도측) 및 지주 녹발생 및 도장 들뜸

○ 검토내용(시설관리공단)

- 현장 확인결과에 따라 가드레일판 강재재도장 물량을 실측 조정하고자 함

- 강재재도장 물량 변경

연번	공종	당초	변경	증감	비고
1	강재재도장	300㎡	605㎡	증) 305㎡	- 보차도 경계 가드레일 - 주형 하면 강판부착부

※ 변경물량 산출근거(현장실측) : 605㎡

․ 가드레일판 : 폭(W) 0.45m × 연장(L) 445.9m × 2(앞,뒷면) = 401.32㎡

․ 가드레일지주 : π × 구경(Φ) 0.1m × 높이(H) 0.6m × 갯수(N) 228개 = 42.96㎡

․ S11 주형 강판 부착부 등 부식 재도장 161.6㎡

상행선 : 폭(W) 1.0m × 30m× 갯수(N) 4개 = 120㎡

하행선 : 폭(W) 0.7m × 14.6m× 갯수(N) 4개  = 40.88㎡

- 개략공사비 : (증) 13백만원

《검토의견》

○ 공단 검토내용과 같이 강재재도장 물량을 현장 실측 결과에 따라 조정하는 것이 타당함

2

《크레인(트럭) 규격 및 사용일수 조정》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 개봉고가 하부로 남부순환로가 통과하며, 그 외 대부분 주차장으로 이용중

- 당초 설계서상 개봉고가차도 슬래브 하부 및 교각 등 콘크리트 보수와 배수시설 정비에 대해 트럭크레인(10ton)을 사용하도록 되어 있으나,

- 공간비계 설치 면적 감소(1,725㎡→610㎡)로 인한 사용일수 증가 및 주차장으로 인한 작업공간 협소로 트럭크레인(10ton) 사용이 어려움

○ 검토내용(시설관리공단)

- 공간비계 설치 면적 감소 및 작업공간 협소로 인해 장비 규격 및 작업일수를 조정하여 시공함이 타당하다고 사료됨

- 장비 규격 및 물량 변경

연번	공종	규격	당초	변경	증감	비고
1	크레인(트럭)	10ton	480 hr	0	감) 480 hr
	크레인(트럭)	3ton	0	752 hr	증) 752 hr

- 개략공사비 : (감) 1백만원

《검토의견》

○ 공간비계 설치 면적 감소 및 작업공간 협소 등 현장 작업여건에 따른 크레인(트럭) 규격 및 물량을 조정하는 것으로 타당함

Ⅲ		처 리 의 견

○ 시설관리공단의 실정보고 사항에 대하여 검토의견과 같이 승인 처리하고,

○ 공사비 변동사항은 추후 설계변경시 반영하여 보수공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 :  현장 실정보고서 1부 (시설관리공단).  끝.