문서번호	조경지원과-1360
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장	동부공원녹지사업소장
임은희		김제중	03/10 이춘희
협조
	주무관		박종천

2015년 조경지원과 시설공사 추진계획

2015. 3.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2015년 조경지원과 시설공사 추진계획

조경지원과 관리 양묘장 및 산하 공원의 노후시설 정비 및 생산기반을 확충하기 위해 2015년 시설공사 추진계획을 아래와 같이 수립하여 공사 시행코자 함.

Ⅰ		추진 방향

❍ 훼손, 노후, 불량시설의 보수 및 정비로 쾌적한 공원 환경 조성 및 이용자들의 의견을 적극 반영한 시설물 설치로 이용만족도 제고

❍ 양묘장 노후기반시설 정비로 안전한 작업환경 조성 및 양질의 조경 소재 생산향상에 기여

❍ 지속적인 시설물 점검 실시로 긴급정비 사항 등 발생 시 우선적으로 정비 시행

Ⅱ		사업 개요

❍ 위    치 : 총 5개소

- 공  원 : 시민의 숲, 천호공원 (2개소)

- 양묘장 : 갈매, 송릉, 덕은 양묘장 (3개소)

❍ 사업기간 : 2015. 3. ~ 10.

❍ 추진방향 : 건설업종별 통합하여 시설공사 추진

❍ 소요예산 : 260,000천원

❍ 사업별 세부내용

(단위:천원)

구분	사업명	소요예산	주요내용	시행방법
				설계	공사
합 계		260,000
양묘장	소계	200,000
	양묘장 기반 시설 정비	20,000	갈매, 송릉 창고 2동 석면제거 및 폐기물 처리	자체설계	수의계약
		75,000	갈매, 송릉 창고2동 구조보강 및 전기시설정비, 사무실 1개소 천정 정비	용역시행	전자공개
		60,000	덕은양묘장 노후 비닐하우스 철거 3연동 비닐하우스 1동 신설	자체설계	전자공개
		45,000	갈매양묘장 배수로 설치	자체설계	전자공개
공원	시민의숲 시설물정비	30,000	노후 야외운동기구 3개소 교체 야외운동기구 7개소 신설	자체설계	관급구매
	천호공원 시설물정비	30,000	산책로 노후포장 약100㎡ 정비 노후 야외운동기구 5개소 교체	자체설계	수의계약관급구매

Ⅲ		세부 추진계획

1. 양묘장 기반시설 정비

가. 석면 철거 및 폐기물 처리

- 위 치 : 경기도 구리시 갈매동 387-15 갈매양묘장 등 2개소 (갈매, 송릉)

- 기 간 : ‘15. 3. ~ 5.

- 금 액 : 약20,000천원

- 규 모 : 약 324㎡ (갈매 204㎡, 송릉120㎡)

- 내 용 : 2012년 시소유 공공건축물 석면조사 결과에 따라 석면 철거 및 폐기물 운반 ․ 처리

- 시행방법 : 석면해체 ․ 제거업 등록업체에 견적의뢰하여 최저가 업체를 선정하여 수의계약시행

나. 창고 구조보강 및 지붕 설치

- 위 치 : 경기도 구리시 갈매동 387-15 갈매양묘장 등 2개소 (갈매, 송릉)

- 기 간 : ‘15. 3. ~ 10.

- 금 액 : 약75,000천원

- 규 모 : 194㎡ (갈매양묘장 창고 1동 158㎡, 송릉 1개소 36㎡)

- 내 용

․ 갈매양묘장 : 석면 철거 후 기둥 및 벽면 구조보강, 전기시설 정비

․ 송릉양묘장 : 기존 창고 지붕(석면) 철거 및 구조 보강, 지붕설치, 천정마감재 재 설치

- 시행방법 : 설계용역 시행 후 공사시행

․ 건축물 구조보강 및 전기시설 보수를 위해 관련 전문가의 설계가 필요함.

다. 덕은양묘장 비닐하우스 설치

- 위 치 : 경기도 고양시 덕은동 525일대 (덕은양묘장)

- 기 간 : ‘15. 3. ~ 8.

- 금 액 : 약60,000천원

- 규 모 : 756㎡ (3연동, 가로18m × 세로42m)

- 내 용

․ 노후 비닐하우스 1동 철거

․ 국화 단일처리를 위한 차광막 자동개폐가능 3연동 비닐하우스 1동 설치

- 시행방법 : 자체설계 후 전자공개수의계약 시행 (온실설치업)

※ 덕은양묘장 비닐하우스 현황 : 총83개동

구 분	계	3연동 (단동환산)	2연동 (단동환산)	단동
수 량	83개동	5개동 (15동)	1개동 (2동)	66 개동
설치(교체) 년도		‘10년 (3동) ’14년 (1동) ‘15년 (1동 예정)	‘97	‘14년(8동) ‘15년(6동 자체정비)

라. 갈매양묘장 배수로 정비

- 위 치 : 경기도 구리시 갈매동 387-15

- 기 간 : ‘15. 3. ~ 6.

- 금 액 : 약45,000천원

- 내 용 : 측구 수로관 900m, 흄관31개소 설치

- 시행방법 : 자체설계 후 전자공개수의계약 시행 (조경시설물설치공사업)

2. 산하공원 시설물 정비

가. 시민의숲 시설물 정비

- 위 치 : 서초구 양재동 236

- 기 간 : ‘15. 3. ~ 6.

- 금 액 : 30,000천원

- 내 용 : 2001년 경 설치된 노후 야외운동기구 3조 교체 및 7조 신설

- 시행방법 : 관급자재 구매 설치

※ 시민의 숲 운동기구 설치 현황 : 달리기 운동 등 14조 (2001년경 설치)

나. 천호공원 시설물 정비

- 위 치 : 강동구 천호동 360

- 기 간 : ‘15. 3. ~ 6.

- 금 액 : 30,000천원

- 내 용

․ 2006년경 설치된 노후 야외운동기구 5조 교체 및 산책로 포장 (약100㎡) 보수 정비

- 시행방법

․ 야외운동기구 : 관급자재 구매 설치

․ 산책로 보수 등 : 자체 설계 후 수의계약

※ 천호공원 운동기구 설치 현황 : 달리기 운동 등 37조 (‘06~‘13년경 설치)

위치	계	사무실앞	광장 옆	중앙 녹지대	분수 테크옆	팔각정뒤	제어실뒤	농구장뒤	헬스장	천일중출입구
수량	37	3	3	3	2	4	7	4	10	1
설치 년도		‘08	‘07~’08	‘06, ’13	‘06, ’13	‘06	‘06,’08	‘06~’13	‘09,’13	‘08

Ⅲ		향후 계획

❍ 2015. 3  : 기술용역타당성 심사 및 실시설계 시행,  관급자재 구매 설치

❍ 2015. 4  : 공사 발주, 시행

❍ 2015. 5 ~ 10  : 공사 착공 및 준공

붙임 : 현황사진 각 1부.

현 황 사 진

□ 양묘장 기반시설 정비 현황사진

갈매양묘장 창고 (석면제거 및 구조보강)	송릉양묘장 창고 (석면제거 및 지붕보수)
송릉양묘장 사무실 석면제거	덕은양묘장 비닐하우스 노후
갈매양묘장 배수로 정비	갈매양묘장 배수로 정비

□ 시민의숲 현황사진

운동기구 신설 맨발공원 - 운동기구 교체 수경시설 윤봉길의사기념관 관리사무소
야외운동시설 신설 (관리사무소~수경시설 산책로 주변)	노후운동시설 교체 (맨발공원 내)

□ 천호공원

운동시설 교체 운동시설 교체 탄성포장 보수
노후 야외운동시설 교체 (5개소)	산책로 노후 포장 정비
산책로 안내문구 정비	산책로 안내문구 정비