투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 제설작업 민간위탁 용역 설계변경(정산) 시행

1. 도로보수과-1693호(2015.2.24.) 및 도로보수과-2294호(2015.3.10.)와 관련입니다.

2. 2014년 회계연도 마감에 따른 2015년 제설대책 잔여기간(3월) 제설대책을 위하여 우리사업소에서 시행중인 「201년 제설작업 민간위탁 용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 제설작업 민간위탁 용역-서부

나. 용역기간 : 2015.3.1 ~ 3.15.

다. 총용역비 : 17,974,000원

라. 도 급 자 : (주)성지씨엔지 대표 김종태

마. 설계변경내역

구 분		설계변경 내역			비고
		당 초	변 경	증 ㆍ 감
총용역비		17,974,000원	16,489,000원	감) 1,485,000원
도급비	공급가액	16,340,000원	14,990,000원
	부가가치세	1,634,000원	1,499,000원
	계	17,974,000원	16,489,000원	감) 1,485,000원

바. 설계변경사유 : 제설작업(민간위탁용역) 시간감소 등 경미한 수량 증·감

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비(180,000천원)-(품의 No.22)

붙 임   1) 설계변경(최종) 내역서 1부.

2) 설계변경(최종) 검토보고서 1부.   끝.

주무관	정병구		주무관	홍용현		주무관	이상하		도로보수과장	03/10 이규철
협조자
시행	도로보수과-2311	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)300-8381	/전송	02)300-8454	/	basewaa007@seoul.go.kr	/	대시민공개