문서번호	도로보수과-2294
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
정병구		이상하	03/10 이규철
협조

2015년 제설작업 민간위탁 용역

설계변경(최종) 검토보고

2015. 3.

도로보수과

2015년 제설작업 민간위탁 용역

설계변경(최종) 검토보고

우리사업소에서 2015년 제설대책 잔여기간(3월)에 시행중인 「2015년 제설작업 민간위탁 용역」과 관련하여 제설대책분야 물량 증·감에 따른 설계변경(정산)을 검토 보고함.

용역개요

◦ 용역명 : 2015년 제설작업 민간위탁 용역

◦ 도급사 : (주)성지씨엔지  대표자 김종태

◦ 용역기간 : 2015. 03. 01 ~ 03. 15

◦ 계약금액 : 17,974,000원

설계변경사유 및 현황

◦ 주요변경 수량 : 제설작업 시간감소 등 경미한 수량 증·감

공 종	구 분	단위	수 량		비고
			당 초	변 경
상황반장	주간	hr	14	3	감 11
	야간	hr	10	8
상황대기원	주간	일	28	26
	야간	일	14	13
제설작업원	주간	hr	24	6	감 18
	야간	hr	20	16
제설작업운전원 (15톤덤프,백호)	주간	hr	60	44
	야간	hr	60	80
제설장비(덤프) 상시대기	15톤	일	70	65
제설작업(15톤덤프)		hr	14	-	감 14
제설작업(백호0.6㎥) 상시대기		일	14	13
제설작업(백호0.6㎥)		hr	10	14

◦ 변경내역

구 분		당 초	변 경	사 유	비 고
도급액	공급가액	16,340,000원	14,990,000원	경미한 수량 증·감
	부가가치	1,634,000원	1,499,000원
	계	17,974,000원	16,489,000원		감 1,485,000원

조치계획

◦ 실작업 물량 정산에 따른 보고 내용과 같이 설계변경 및 변경계약 시행코자 함.

별첨 : 1) 설계변경 내역서(제1회) 1부.   끝.