	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강동소방서 사무공간 재배치 등 설계용역 계약이행지체 및 향후처리 계획 보고

1.  관련문서

가. 강동 소방행정과-344(2015.1.9.)호“강동소방서 사무공간 공사 계획”

나. 강동 소방행정과-1880(2015.2.13.)호“강동소방서 사무공간 재배치 등 공사 설계발주 계획”

다. 강동 소방행정과-1941(2015.2.16.)호“강동소방서 사무공간 재배치 등 공사 설계용역 전자수의시담 계획”

라. 강동 소방행정과-2076(2015.2.17.)호“강동소방서 사무공가 재배치 등 공사 설계용역 수의시담 개찰 및 낙찰자 선정 보고”

2. 강동소방서 사무공간 재배치 등 설계용역 계약에 따른 설계도서 납품 지연으로 계약이 원활이 이행되지 않아 향후 처리 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 용역내용

1). 용 역 명 : 강동소방서 사무공간 재배치 및 노후환경개선 공사 설계 용역

2). 용역기간 : 2015. 2. 17. ~ 2015. 3. 9. (21일간)

3). 수 급 인 : 산성건축사무소 대표 정재학

4). 계약금액 : 금5,500,000원(금오백오십만원정)

5). 계약방법 : 전자수의시담 『수의계약』

나. 향후 처리 계획

1). 지체상금부과

- 지체상금율 : 계약금액의 0.25% (1000분의 2.5)

- 지체상금액 : 13,750원 / 1일당

- 지체상금산정 : 지체 일수에 1일당 지체상금액에 곱하여 산정

- 처리방법 : 서울시 세외수입 위약금으로 처리(경상적세외수입/잡수입/위약금)

2). 계약의 해지

- 지체상금이 계약금액의 10%이상인 경우 (지체일수 40일이상)

- 지체일수 10일 초과시 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 의거 수의계약 결격업체로 서울시 소속 기관에 공표.  끝.

담당자	김기범		장비회계팀장	이은규		소방행정과장	손문종		소방서장	03/10 이영우
협조자
시행	소방행정과-2910	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내로39(성내동 541번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	대시민공개