투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『재사용플라자 건립공사』공정관리 및 안전관리 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 계약체결하여 시행중에 있는 「재사용플라자 건립공사」와 관련, 우리시에서는 도기본 건축부-1245호(‘15.2.2)호로 “계획공정에 맞춰 기존건물 철거, 전주철거, 부지정리, 가설울타리 및 현장사무실 설치 등” 계약이행에 철저를 기하도록 협조요청한 바 있습니다.

3. 그러나 귀 사의 공사 진도율은 당초 계약상 계획공정대비 현저하게 낮은 실정으로서 우리시의 전체적인 사업일정에 막대한 차질이 예상되고 있습니다.

4. 건설사업관리용역업자 및 시공자께서는 공사계약서, 법규정에 따라 PERT/CPM 기법을 적용하여 체계적으로 공정관리 하는 등 계약이행에 만전을 기하여 주시기 바라며, 공정지연에 대한 만회대책(그동안 실시한 공정회의 자료, 감리원 보강대책 등 포함)과 이에 따른 안전사고 예방대책을 2015.3.18.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 아울러, 귀 건설사업관리단에서 제출한 「착공계 검토보고」

(RPCM15-16;’15.3.5) 공문의 “공사예정공정표”는 당초 계약서와 상이할 뿐 아니라, 구체적인 공정 파악이 불가하오니 다시 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)펨코엔지니어링 대표이사 김수호,동원건설산업(주) 대표이사 김영현,주식회사 서우건영 대표이사 김기수
★지방시설사무관대우	차무흥		환경시설과장	代차무흥		건축부장	03/11 김우성
협조자
시행	건축부-2812	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스 빌딩 13층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	cmh2932@seoul.go.kr	/	대시민공개