문서번호	방재시설부-3247
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
임성은		신용우	03/11 임춘근
협조

『서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사』

조경분야 실정보고사항 검토 보고

2015. 3

서울시도시기반시설본부

[방재시설부]

『서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사』

조경분야 실정보고사항 검토 보고

『서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사』와 관련 임시주차장

설치지역 지장수목 이식 및 제거에 대한 책임기술자 실정보고에 대한

검토임.

〔관련근거 : 서도기-건-011(2015.03.10)호〕

공사현황

○ 위    치 : 서초구 헌릉로 260 어린이병원내

○ 규    모 : 연면적 31,808.4㎡, 조경면적 3,380.69㎡

○ 공사기간 : 2014.01.20 ~ 2017.02.19

○ 공 사 비 : 조경 7억원(전체 109억원)

○ 감리사/시공사 : ㈜영화키스톤건축사사무소/대자개발(주)

실정보고사항(조경)

구 분	시공사 실정보고내용	책임기술자 검토의견
지장수목 수량 변경	▶ 임시주차장 부지내 측백나무, 잣나무 관목 등은 수형 및 영양상태가 불량 하여 폐기처리 하고 수형이 양호한 단풍나무 9주는 병원부지내 이식한 후 임시주차장 원상복구시 조경계획에 의거 정식토록 하고자 함. - 이식수목 : 교목 41주 → 50주(+9)	▶ 임시주차장 설치와 관련 부지내 수목이식 사항으로 수형 및 생육 상태가 양호한 단풍나무 9주는 병원 부지내 가식장으로 이식후 임시 주차장 복구시 정식 조치하고 수형 및 생육 상태가 불량한 측백나무 잣나무, 관목등은 폐기하고자 함.

수목식재 및 이식 공사비 증감 현황

(단위:원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
직접공사비	14,267,607	19,088,972	4,821,365
간접공사비	5,396,030	7,092,847	1,696,817
공급가액	19,663,637	26,181,819	6,518,182
부가가치세	1,966,363	2,618,181	651,818
합계	21,630,000	28,800,000	7,170,000

검토결과

서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 임시주차장설치와 관련 부지내

지장수목 처리에 대한 실정보고 사항으로 내용 검토한 바, 본공사 시행에

앞서 처리해야할 공종으로 책임기술자의 검토의견을 수용 하고자 하며

공사비 증감액은 3,000만원 이하이므로 설계변경심의 없이 시행할 수 있으

므로 승인처리하고, 추가된 공사비는 추후 설계변경에 반영토록 책임건설

사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임 : 실정보고(임시주차장부지내 수목이식) 승인요청 공문서 1부.  끝.