문서번호	토목부-4907
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	03/11 노우성
협조
	주무관		유근평

지장물(하천수위계, 무인교통단속장비)이설 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토목부)

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

지장물(하천수위계, 무인교통단속장비)이설 검토보고

본선교 및 주암교 설치구간에 저촉되는 하천수위계, 무인교통단속장비의 이설 방안을 유지관리기관(서초구, 서울지방경찰청)과 협의, 원인자부담으로 시행토록 회신되어 이설계획을 검토 보고드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (9차: 25,000백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(9차 `15.3.1.~`15.12.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

관련근거

❍ 서초구 안전치수과-18698호(`14. 8.14.) 자동강우관측시스템 이설 회신

❍ 서울시경 교통관리과-31439호(`14.11.12.) 교통단속장비 이설 협조

❍ 동기강 2015-80호(`15. 2.27.) 지장물 이설 승인 보고

현  황

❍ 하천수위계가 철거후 신설되는 기존 주암교 교량 상에 설치되어 있어  이설이 필요함

- 서초구 협의결과 하천(양재천) 수위 및 강우량 관측에 지장이 없는 장소로 이설하도록 회신됨.

❍ 무인교통단속장비가 본선교 교각 P5, P6구간에 설치되어 있으나, 추후 본선 고가교 설치에 지장이 되어 이설 불가피

- 서울시지방경찰청 협의결과 도로선형 변경으로 인해 단속장비를 은평구 연서로 연신초등학교 앞으로 이전 설치를 요청함.

❍ 위 치 도

❍ 주요 공사내용

공 종	규 격	수 량	비 고
하천 수위관측시스템	기존교량→신설교량 이설	1기
무인교통단속장비	기존도로→은평구 연사로	1기

조치계획

❍ 본선교 및 주암교 설치공사의 원활한 추진을 위하여 시설물 유지관리기관(서초구, 서울지방경찰청) 의견을 반영하여 지장물을 이설하고

❍ 소요 이설공사비(16,000천원)는 감리 보고내용에 의거 설계변경 추진하여 도급비에 반영하고자 함.

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
하천 수위관측시스템	-	3,480	3,480
무인교통단속장비	-	9,857	9,857
직접공사비	-	13,337	13,337
간접공사비	-	1,208	1,208
공급가액	-	14,545	14,545
부가가치세	-	1,455	1,455
총 공 사 비	-	16,000	16,000

【붙임】 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.