문서번호	도시철도설비부-2496
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
	차량과장	도시철도설비부장
이호식	황영일	전결 03/12 정찬웅

지하철 9호선 2단계 개통 대비영업시운전 상황보고(2015.3.10)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

지하철 9호선 2단계 개통 대비

9호선 2단계 영업시운전 상황 보고

2015. 3. 10.(화)

□ 금일실적

급 전	단 전	통 제 자
04 : 39	익일 01 : 30	1단계 관제

○ 제2단계 영업시운전 실시

- 운행기간 : 2015.1.31 ~ 3.20(49일간)

- 운행구간 : 개화, 김포공항역 ~ 종합운동장역

- 운행시간 : 05:30 ~ 25:00

- 운행방식 : ATO/ATP(필요시 수동)

- 일반․급행 비율 : 1:1

- 운행시격 : 영업DIA에 의함

- 운행횟수(평일) : 480회(일반 248회, 급행 232회)

- 운행횟수(휴일) : 416회(일반 216회, 급행 200회)

○ 시운전열차 운행 결과

- 930역 상선 승강장에서 개화방면 운전실 선택 후 출입문 비정상 닫힘 발생(원인분석 중)

- 930역 하선 종합운동장 출발시 출입문 정상 작동되나 PSD 연동불능 OPD취급 후 출발

- 926역 상선 진입시 비상제동(과속) 체결, 정차 후 ATO정상 출발

- 929역 상선 통과중 비상제동(과속) 체결, 정차 후 ATO정상 출발

○ 근무자 : 21명(본부 1명,서울메트로 2명, 감리단 1명, 시공사 5명,안전관리 10명)

- 시운전상황실 : 이호식

□ 야간 작업

- 신흥정보통신 : 9호선 2단계 이동통신 시설공사

- KT ENS : KT LTE 구축공사

- 9호선운영사업소(T/F팀) : 9호선2단계 선로전환기, 전차선로 및 구조·시설물 점검

※ 특이사항 : 서울시 시의원 9호선 2단계구간 시찰(10:40 ~ 11:20).  끝.