문서번호	방재시설부-3322
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김달용		김인숙	03/12 임춘근
협 조
	주무관			박계현

『경의선숲길 공원조성공사』

연남동 및 새창고개 진입계단(램프) 설치 실정보고

2015. 3.

『경의선숲길 공원조성공사』

연남동 및 새창고개 진입계단(램프) 설치 실정보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『경의선숲길 공원조성공사(2단계)』시공중 연남동 홍대입구

및 새창고개 푸르지오아파트 진입계단(램프) 설치계획에 따른

책임감리원 실정보고에 대한 검토 보고임.

▸관련공문 : 경의경춘(감)제2015-141호(2015.3.5.)

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 문화체육센터~마포구 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡ (L=3.48㎞)

○ 기    간 : 2013. 9.30 ~ 2016.3.31.

○ 사 업 비 : 17,770백만원 (도급비 11,812, 관급비 등 5.958)

Ⅱ		실정보고

○ 설치개요

▸연남동 3번출구 입구 주변 통행계단 2개소

[공원조성과-13949호(2014.11.26)]

▸새창고개 푸르지오APT 진입램프 및 계단 1개소

[방재시설부-13249호(2014.12.12)]

○ 보고내용

▸『경의선숲길 공원조성공사』연남동 홍대입구역 3번 출구 주변의

통행로 설치요청과 새창고개구간 대우푸르지오아파트 램프 및 계단

설치 민원반영에 따른 설계변경 실정보고 임

Ⅲ		검토결과

○ 연남동 통행로 계단

▸3번 출구 건너편 상가 이면도로를 연결하는 보행통로의 개설위치와

계단의 화강석 판석 버너마감 등 미끄럼 방지를 위한 조치가 적정함

▸계단 주변의 사면처리 변경(깬돌면깔기→잔디식재)은 예산절감 및

녹시율 향상 효과가 있음

○ 새창고개 진입램프(계단)

▸램프 벽체는 기존 푸르지오아파트의 옹벽(화강석판석 붙임)과 조화

되도록 포천석 물갈기 마감이며, 바닥은 미끄럼방지를 위한 버너마감

으로 램프경사 8%가 유지되었음

▸난간은 세로방향으로 제작하도록 하여 발디딤 방지하도록 조치

○ 소요예산                                         (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증 감
		수량	금 액	수량	금 액
계			265,099		313,366	48,267
연 남 동 계단설치	개소	-	173,745	2	167,809	△5,936
새창고개 램프계단	개소	-	-	1	18,195	18,195
제 경 비			91,354		97,795	6,441
관급자재					29,567	29,567

Ⅳ		보고자 의견

○ 연남동 보행통로 개설과 새창고개 진입램프 설치에 대한 책임건설

사업관리기술자의 의견이 타당하다고 판단되며, 향후 설계변경 시

반영하도록 승인하고자 함

붙임 : 감리검토의견서 및 현황사진 1부.  끝.

현황사진

연남동구간 홍대입구역 통행계단 설치 예정지역 (2개소)

새창고개구간 푸르지오아파트 진입램프(계단) 설치 예정지역