문서번호	정수시설과-913
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	03/12 유성종
협 조
	주무관			김희수

≪2015년 전기설비≫ 유지보수공사(연간단가) 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

암사아리수정수센터

≪2015년 전기설비≫

유지보수공사(연간단가) 발주 계획

우리 정수센터의 2015년 전기설비 유지보수 공사(연간단가 계약)를

아래와 같이 시행하여 전기시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

❍ 본부장 방침 기전설비과-299(2013.1.21.)호

『청렴도 향상 및 업무효율 증대를 위한 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획』

❍ 기전설비과-1265(2015.3.2.)호

『2015년도 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획 알림』

□ 추진 개요

❍ 추진기간 : 2015. 3. ∼ 2015. 12. 31

❍ 적용대상 : 정수센터 전기설비(수․배전설비, 조명설비, 전선로, 기타 전기설비)

❍ 추진방법 : 본부 설계지침 반영하여 추진.

□ 사업시행 방법 및 추진 방향

❍ 우리 정수센터 수․배전 설비 유지보수는 전문성과 숙련도가 필요한 분야로 한국전기공업협동조합의 우수업체 추천을 받아 지명경쟁입찰로, 기타 일반전기설비는 공개경쟁(지역제한)입찰로 분리하여 발주코자 함.

- 수·배전 설비 분야 :  수·배전 설비 유지보수 공사(연간단가)

- 일반전기설비 분야 :  일반전기설비 유지보수공사(연간단가)

❍ 장기간 사용으로 인한 노후 및 고장전기설비에 대하여 신속히 정비 조치.

❍ 불합리한 전기설비에 대한 보완 및 개량

❍ 전기안전진단 결과 발견된 문제점에 대한 조치

❍ 작업은 작업지시서에 의하며, 계약금액 범위내에서 선시공 후 정산처리하되 계약상대자의 기성 청구시 작업완료 보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

□ 유지보수 대상 주요전기설비

❍ 수전선로 : 2회선

연번	선로 명칭	케이블 규격	연장(m)	제작사	제작년월	비고
1	천호-암사T/L	XLPE cable 200[㎟] 1C-3	5,100	LS전선	1986~2010	주
2	강동-암사T/L	XLPE cable 200[㎟] 1C-3	3,418	대한전선, LS전선	1986~2010	예비

❍ 170KV GIS설비 : 2BAY

연번	위치	제작사	제작년월	비고
1	GIS실	주식회사 효성	1985.11	천호-암사T/L
2	GIS실	주식회사 효성	2005.09	강동-암사T/L

❍ 주 변압기 : 4대

연번	위치	용량	제작사	제작년월	비고
1	주 변전실	15000/20000KVA	㈜효성	2006.12
2	주 변전실	15000/20000KVA	일진중공업	2004.10
3	주 변전실	15000/20000KVA	㈜효성	2006.12
4	주 변전실	15000/20000KVA	㈜효성	2005.10

❍ 비상발전기 : 4대

연번	위치	용량	제작사	제작년월	비고
1	본관	227KW	EAST POWER. CO. LTD	2007.12
2	2송수장	159KW	EAST POWER. CO. LTD	2007.12
3	1취수장	130KVA(104KW)	삼양전기	1997.08
4	2취수장	130KVA(104KW)	삼양전기	1997.08

❍ 기타시설 : 수․배전반, 조명설비, 전선로, 전동기, UPS, 등

□ 소요예산 및 발주방법

❍ 소요예산 : 120,000천원

- 수·배전설비 유지보수공사(연간단가) : 80,000천원

- 일반전기설비 유지보수공사(연간단가) : 40,000천원

❍ 예산과목별 소요예산:

- 정수비(712) : 100,000천원

- 원수 및 취수비(711) : 20,000천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비(원수 및 취수비), 수선유지교체비,                기타교체비(정수장 유지관리, 취수장 유지관리)

❍ 발주방법 :

- 수․배전설비 유지보수공사(연간단가) - 지명경쟁입찰

- 일반 전기설비 유지보수공사(연간단가) - 공개경쟁입찰(지역제한경쟁).

□ 세부 추진일정

❍ 2015. 2. : 현장조사 및 설계서 작성

❍ 2015. 3. : 공사발주 및 착공

❍ 2015. 3 ~ 12 : 작업지시 및 작업완료보고

❍ 2015.12. : 공사준공.

붙임 : 1. 수.·배전설비 유지보수공사(연간단가) 설계서 1부.

2. 일반 전기설비 유지보수공사(연간단가) 설계서 1부.  끝.