투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	선금지급 관련 업무협의 회신(서빙고 - 5차)

1. 건설총괄부-4976호(2015. 3. 11.)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사(5차)에 대한 시공사로부터 선금지급 요청에 대한 우리부 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 계약건명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 5차

나. 계약업체 : ㈜흥화, 보훈종합건설(주)

다. 계약기간 : 2015. 3. 3. ~ 2015.12.31.

라, 계약금액 : 7,893,100,000원

마. 선금신청액 : 3,157,240,000원(계약금액의 40%)

바. 검토의견

- 선금신청액은 관련법령에 의거 선금의무지급률 40%이하로 적정함

- 2015. 3월 현재 공정율이 59.7%로 2015. 10월 본선 개통을 위한 상부공 강교거치 및 슬래브 타설등이 원활히 추진될 수 있도록 선금을 지급하는 것이 타당하나                - 지급한 선금이 선금지급일로부터 15일 이내에 하수급자에게 지급되어야 공사가 원활하게 추진될수 있으니 조건을 부여하여 지급.  끝.

	토목부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	03/12 노우성
협조자	주무관	박근우
시행	토목부-5075	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(6)