투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청[서울거리예술창작센터 조성 기계설비공사]

1. 문화정책과-2251(2015.02.23) 및 설비부-3013호(2015.03.12)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 「서울거리예술창작센터 조성 기계설비공사」에 대하여 준공기한 연기 요청을 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 서울거리예술창작센터 조성 기계설비공사

- 계약기간 : ′14.12.03. ~ ′15.03.20.

- 도 급 비 : 금245,294,800원

- 계 약 자 : ㈜상록이티씨 대표 한승호

나. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사 기간	2014.12.03. ~ 2015.03.20	2014.12.03 ~ 2015.04.10	(증21일) 계약금액 변경없음

다. 준공기한 연기사유

- 사업주관부서의(문화정책과) 사업내용 변경에 따른 신규공정 추가로 기계설비공사의 절대공기가 부족하여 준공기한 연기 필요.

라. 귀책소재 : 발주처

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 공사기간 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	유병기		설비부장	03/12 박기형
협조자
시행	설비부-3027	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 서울특별시 도시기반시설본부 설비부(프리미어플레이스빌딩 15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	대시민공개