투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	용산구청장(토목과장)
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 기간연장 승인(서부이촌동)

1. 토목과 3366-08(2015.3.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 교통안전시설물 원인자 부담공사 기간 연장에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서부이촌동 전선지중화 사업 중 교통신호기 개선공사

나. 공사장소 : 이촌2동(새남터천주교교회~부영주유소 간)

다. 원 인 자 : 용산구청 토목과

라. 공사기간변경승인

- 당 초 : 2015.2.3.~ 2015.3.3.

- 변 경 : 2015.2.3.~ 2015.4.30.

(교통안전시설정보(TGIS)에 시설물정보 입력후 준공요청)

마. 변경사유 : 온라인리포트 수령지연으로 인한 공기연장. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	정성욱		주무관	윤석주		기전과장	03/12 代윤석주
협조자
시행	기전과-2605	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8410	/	wook4125@seoul.go.kr	/	대시민공개