문서번호	설비부-3013
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		유병기	03/12 박기형
협 조

- 서울 거리예술창작센터 조성 기계설비공사 -

공사기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

도시기반시설본부

설비부

「서울 거리예술창작센터 조성 기계설비공사」

공사기간 연기 검토 보고

사업주관부서(문화정책과)의 공사내용 일부 변경으로 추가 공정이 발생함에 따라 다음과 같이 연기 조치하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 기계설비공사

공사위치 : 광진구 광장동 17번지 일대(구의 취수장)

공사규모 : 위생설비, 환기설비, 급수ㆍ급탕설비, 소방기계

계약기간 : 2014. 12. 03. ∼ 2015. 03. 20.

계약금액 : 금245,294,800원

시 공 자 : ㈜상록이티씨(대표 한승호)외 1

Ⅱ		공사기간 연기 검토 내용

관련근거

○ 서울거리예술창작센터 조성공사 일부 변경사항 통보 : 문화정책과-2251(2015.02.23)

공사기간 연기사유

○ 사업주관부서(문화정책과)의 공사 내용 일부 변경으로 추가 시공물량이 (2동 화장실 및 샤워실 신설) 발생하여 당초 공사기간으로는 잔여 공정(現 공정률 80%) 완료를 위한 절대공기가 부족하여 공사기간 연기조치가 필요함.

공사기간 연기내용

구분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2014.12.04.∼2015.03.20	2014.12.04.∼2015.04.10	(증21일) 계약금액 변경없음

귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금부과여부 : 미부과

Ⅲ		보고자 조치의견

본 기계설비공사의 당초 준공기한을 2015.04.10.일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 공사 변경사항 통보 공문(문화정책과) 1부. 끝.