투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행('14/'15년 제설작업용역(장기계속) 전체2회 및 2차1회

우리사업소에서 시행중에 있는 『2014~15년 제설작업용역(장기계속)』에 대하여 전체2회 및 2차1회 설계변경코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014~15년 제설작업용역(장기계속)

나. 도 급 자 : 성심중기  대표 오정현

다. 변경내용

1) 준공기한

- 전체분 : 2014. 11. 10.~ 2015. 4. 15.(변경없음)

- 1차분 : 준공.

- 2차분 : 2015. 2. 16.~ 2015. 4. 15.(변경없음)

2) 도 급 비

- 전체분 : 250,000,000원→ 변경 200,470,000원(감 49,530,000원)

- 1차분 : 당초 181,550,000원(준공)

- 2차분(신규계약) : 68,450,000원→ 변경 18,920,000원(감 49,530,000원)

※ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물유지관리, 제설대책추진, 시설비및부대비, 사무관리비

라. 변경사유 : 장기계속공사로 제설기간종료에 따른 정산을 위한 설계변경

첨  부 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경내역서(전체2회변경),

3. 설계변경내역서(2차1회변경). 끝

주무관	하승환		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	03/12 이종엽
협조자	주무관	홍수종		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1009	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개