문서번호	시설관리과-1821
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
홍석현	한명석	강신재		03/13 고인석
협 조

「상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역」

참여 기술자 투입인원 변경계획

2015. 3.

	상수도사업본부
	시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역」

참여 기술자 투입인원 변경계획

우리 본부에서 시행하고 있는 「상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역」 의 내실 있는 추진을 위한 참여 기술자 투입인원 변경투입 계획을 보고 드림.

□ 용역 현황

❍ 사업내용 : 상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역

❍ 용역업체 : ㈜이준엔지니어링 외 2개사

❍ 용역기간 : ′14. 10. 28. ~ ′15. 5. 24.

❍ 용역금액 : 898,282 천원

□ 투입인원 변경 타당성 검토

❍ 검토배경

- 시설관리공단에서 감독대행 시에는 사업소 당 2명씩 수행하였으나, 현재 용역업체는 강남․강동 수도사업소에 1명으로 감소하였음.

⇒ 강남․강동 수도사업소에서 추가 배치요청

❍ 추가배치 필요성 검토

- 8개 수도사업소 시설물 작업량 비교 시, 각 사업소간 큰 차이가 없음.

⇒ 강남․강동 사업소의 부실한 감독 대행 우려(초급 1명씩 추가 필요)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
작업지시 건수 (′14.3월~5월)	1,947	143	123	680	195	156	243	247	160
′15 노후밸브 정비계획	2,000	275	220	255	160	305	300	275	210

❍ 계약금액 검토

- 계약금액 : 898,282 천원

구 분	예 상 액	기지출액	1 ~ 2월	3월	4월	5월
변 경	812,275천원	286,627천원	50,691천원	174.086천원	174,086천원	126,785천원

※ 강남․강동 추가 배치(각1명)시, 준공 예정금액은 계약금액 이내임.

❍ ’15년 예산현황 검토

- (예산과목) 노후밸브 정비, 시설비및부대비, 감리비 : 1,600백만원

- 강남․강동 초급 1명 추가 배치 소요예산 추정 시, 예산액 이내임.

구 분	당 초	변 경	비고
계	1,521,466 천원	1,572,826 천원
동절기	50,691 천원	50,691 천원	(1～2월)
3～5월	156,966 천원×3개월	174,086 천원×3개월	(증) 초급 2명
6～12월	156,966 천원×6개월	156,966 천원×6개월	신규 용역(7월제외)
7월 장마철	58,081 천원	58,081 천원	`투입인원조정 : 강남․북 각3명 (중1, 초2)

□ 투입인원 변경계획

❍ 투입인원 변경내용

- 강남․강동 수도사업소에 초급 1명씩 추가배치코자 함.

구 분	당 초	변 경
기간별 투입인원	○ 3월 1일 ～ 5월 24일 : 현행 근무인원(15명)	○ 3월 1일 ～ 3월 15일 : 현행 근무인원(15명) ○ 3월 16일 ～ 5월 24일 : 근무인원(17명) - 사업소별 2명(증 초급2명)

❍ 사업소별 배치인원

등 급	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중 급	9	2	1	1	1	1	1	1	1
초 급	6 ⇒ 8	1	1	1	1	1	1	0 ⇒ 1	0 ⇒ 1

※ 책임건설사업관리기술자(1명) 중부 근무

❍ 투입인원 추가에 따른 효과

- 강남․강동 수도사업소에 타 수도사업소와 동일한 인원으로 투입하여 감독대행 부실을 사전에 방지하고 원할한 시설물 설치 및 보수공사 감독대행 업무를 기대

□ 향후 계획

❍ 투입인원 추가계획 용역수행 업체 및 수도사업소 통보

- 용역수행 업체 : 투입인원 추가에 따른 용역 수행계획서 별도작성 보고

- 수도사업소 : 용역 참여 기술자의 효율적 운영토록 작업지시

붙임 : 2014년 작업지시 월별 내역 1부. 끝.