문서번호	도로보수과-2440
보존기간	년
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장
최완		03/13 이석재
협조

- 2015년 제설잔여기간(3.1~3.15) 민간위탁용역 - 설계변경(정산) 검토 보고

2015.  3

북부도로사업소

[도로보수과]

- 2015년 제설잔여기간(3.1~3.15) 민간위탁용역 -

설계변경(정산) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중에 있는『2015년 제설잔여기간(3.1~3.15) 민간위탁용역』에 대한 설계변경(정산) 검토 보고임.

공사현황

○ 사 업 명 : 2015년 제설잔여기간(3.1~3.15) 민간위탁용역

○ 용역개요 : 제설대기 및 제설작업 1식

○ 용역기간 : 2015.03.01 ~ 2015.03.15

○ 용역금액 : 18,050,000원

○ 도 급 자 : 청풍건설(주)  대표 박정일

설계변경 사유

○ 제설기간 제설작업 정산에 따른 용역비 증액 발생

⇒ 당 초 : 용 역 비 ⇒ 18,050천원

⇒ 변 경 : 용 역 비 ⇒ 21,032천원(증액 2,982천원)

○ 증액사유 : 제설대책 보강근무(2회) 발령에 따른 제설작업

※ 제설대책보강 근무 : 2015. 2. 28일 21시 ~ 익일 08시

2015. 3. 12일 18시 ~ 익일 08시

(재난안전대책본부-14호, 재난안전대책본부 -16호)

설계변경 내용

○ 주요 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증 ․ 감	비 고
			당 초	변 경
제설작업운전원	주 간	hr	30	51	증) 21
	야 간		30	88	증) 58
제 설 작 업 원	주 간	hr	16	18	증) 2
	야 간		24	32	증) 8

○ 용역비 변경

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 용 역 비		18,050,000	21,032,000	증) 2,982,000
도급비	공급가액	16,409,091	19,120,000	증) 2,710,909
	부가가치세	1,640,909	1,912,000	증) 271,091
	계	18,050,000	21,032,000	증) 2,982,000

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 민간위탁용역 제설작업물량 증ㆍ감에 따른

설계변경(정산)을 시행코자 함 .

따로붙임 : 1) 변경(정산)설계서 1부.

2) 관련공문 1부.     끝.