문서번호	도시철도계획부-2232
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
정원영		김진팔	03/13 박상돈
협조	주무관		김현기
	주무관		이형일

구일역 서측출입구 추가설치 관련

행정인허가 및 지장물 이설 완료보고

2015. 3

도시철도계획부

구일역 서측출입구 추가설치 관련

행정 인허가 및 지장물 이설등 완료보고

고척 돔구장 개장(‘16.3)에 맞춰 구일역 서측출입구 추가 설치공사를  한국철도공사에서 위탁시행하고 있으나, 협약후 1년이 지나도록 공사착공이 지연된 업무에 대해 우리본부에서 행정 인허가, 지장물(폐기물, 컨테이너 등) 이설, 설계도서 보완 등 공사시행준비완료사항을 보고드림.

개  요

○ 위    치 : 구로구 구로동 636-46(경인선 구일역)

○ 규    모 : 총면적  1,701㎡(지상 2층)

- 지상 1층 270㎡, 지상2층 661㎡, 연결통로 및 승강장 770㎡

○ 사업기간 : ‘15. 3.  ~ ’16. 8

○ 사 업 비 : 7,697백만원(건축공종만 발주, 서울시 부담)

- 전기, 신호, 전차선 향후 발주(약 30억원 소요)

○ 시공사/감리단 : 태평로건설/ ㈜종합건축사무소 근정

추진경위

○ ‘14.01.03 : 사업시행 협약체결(서울시 문화체육관광본부, 한국철도공사)

○ ‘14.12.26 : 공사계약 체결(한구철도공사↔태평로건설)

○ ‘15.01.13 : 하천점용허가 신청에 따른 보완요구(서울지방국토관리청)

○ ‘15.01 ~2. : 지장물이설 및 설계도서 보완 완료

○ ‘15.01.29 : 구일역 서측출입구 관련 T/F팀 구성․운영

○ ‘15.03.05 : 하천점용허가 및 실시설계인가(서울지방국토관리청)

○ ‘15.03.05 : 공사착공

분야별 주요 추진사항

<하천점용허가>

○ 추진기간 : ‘15.1.16 ~ 2.27

○ 추진내용 : 서울지방국토관리청 방문 등 협의(방문 20회, 구두협의 60회)

○ 추진결과 : 하천점용허가 획득(점용기간 : ‘15.3.4~’16.5.16)(별첨 #1)

<현 설계도서에 대한 공기 단축방안 및 시공준비>

○ 추진기간 : ‘15.1.16 ~ 2.25

○ 추진내용 및 결과

- 중앙연결통로 시공방법 개선으로 안전시공 및 공기단축(공기단축 3.5개월)

▸ 당초 : 거더 5개를 3등분으로 분할 연결하여 현장시공

▸ 변경 : 횡방향 중앙에 벤트 설치, 거더와 프리캐스트 바닥 2등분 연결 설치

- 선로주변 작업용 안전휀스 별도 설치로 주․야간 병행작업 시행(공기단축 3개월)

- 기둥설치 공법변경으로 시공성 및 안전성 개선(공기단축 3개월)

▸ 당초 :SRC 콘크리트 기둥 → 특수 강관기둥

<안전성 확보를 위한 설계도서 보완 완료>

○ 추진기간 : ‘15.1.16 ~ 2.25

○ 추진내용 및 결과

- 안전성 확보를 위한 현재 설계보완 및 추가 : 현장조사 및 검토 등 20회

▸ 설계된 연결통로구조에 대한 시공단계별 바닥판과 주형의 연결 적정성등 검토

▸ 기초 시공시 안전성 확보를 위한 가시설계획 등 토목설계 추가

▸ 목감천 공사용 가축도 상 크레인 설치 작업에 따른 안전성 확보 설계

▸ 안양천 작업장 사용에 따른 수리 검토 추가 등

<지장물 이설조치>

○ 추진기간 : ‘15.1.16 ~ 2.27

○ 추진내용 : 지장물 소유주별로 15회에 걸쳐 1:1 밀착 협의

○ 추진결과 : 건설폐기물, 컨테이너, 건설자재 등 이전조치하여 공사용 부지 확보 완료

따로붙임 : 1. 하천점용허가 및 실시계획인가  1부.

2. 공기단축 및 설계 개선방안 검토 1부.

3. 지장물 이설 완료 사진대지 1부(별도).   끝.