문서번호	토목부-5241
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	03/16 노우성
협조

방음벽 규격 변경설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

방음벽 규격 변경설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

구리암사대교의 램프 B에 설치할 방음벽을 서울시민디자인위원회 심의 결과에 따라 규격을 변경하여 설치하고 검토 보고하는 사항임.

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2015. 6.30.

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜ 신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 위치도

◦ 방음벽 지주 간격이 2m 설계되어 있음

◦ 방음판 재질은 폴리카보네이트로 설계되어 있음

◦ 방음벽 현황

위치	연장	기초형식	방음벽 높이	방음판 높이	지주간격	방음판재질
암사 Ramp-B	150m	L 형	5m	4m	2m	PC (Polycarbonate)

■ 디자인심의 결과

구 분	현설계	디자인심의결과	비 고
방음판 재질	PC (Polycarbonate)	강화접합유리
방음벽 지주 간격	2m	4m

■ 수량변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
지주 간격	2 m	4 m	증 2m
지주 수량	75 EA	38 EA	감 37 EA

■ 공사비 비교

구 분	현 설 계	디자인심의결과
		설계가	협의율 (90.202%)	낙찰율 (80.405%)
방음판재질	PC	강화접합유리
지주간격	2m	4m
공사비	334,770천원	215,820천원	196,130천원	176,440천원

■ 감리단 검토의견

◦ 상기 방음벽 규격 변경은 서울시민디자인심의결과를 반영한 것으로 설계변경 자문회의 자문결과에 따라 추후 설계변경시 반영함이 타당함

■ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규 공종에 대하여 낙찰율 80.405% 적용

○ 도급자 : 신규 공종에 대하여 100% 반영 요청

■ 조치 의견

○ 상기 감리단 검토의견대로 반영하고 추후 설계변경심의 결과에 따라 정산 처리 함이 타당하다고 사료됨.

○ 금회 실정보고건은 신규 공종으로 공사 시행 협의 하였으나 협의가 되지않아 부득이 공사계약일반조건 제20조 제2항에 따라 강제협의율(90.202%)을 적용함.

- 개략공사비 : 감) 138백만원

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 시공사 협의 공문사본 1부.  끝.