문서번호	시설보수과-2027
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		박병연	03/16 조병준
협 조
	주무관			윤신식

설계변경(정산) 검토 보고

(2014년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 검토 보고

(2014년 개봉고가차도 보수공사)

「2014년 개봉고가차도 보수공사」의 감독기관인 시설관리공단으로부터 발주청 작업지시 및 현장 실정보고와 실측물량 정산에 따른 물량증감으로 인한 공사비 변경을 위한 설계변경(정산) 보고서가 접수되어 이에 따른 조치계획을 보고 드림

※ 2015.03.12. 시설관리공단 공사감독1처-2337호 “설계변경(정산) 도서 제출”

Ⅰ		공사개요

공 사 명 :  2014년 개봉고가차도 보수공사-강서

공사기간 : 2014. 09. 22 ~ 2015. 03. 20

공사개요

- 포장보수공 : 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부(방수) 재포장 10a

- 콘크리트보수공 : 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m

- 배수시설정비공 : 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소, 교량배수구 관세정 370m, 배수구 구멍뚫기 43개소

- 기타보수공 : 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m, 슈청소공 82개소, 케이블보호용덮개보수 72개소

- 부   대   공 : 공간비계설치 1,725㎡, 보호막(분진·방진망) 설치 1,897㎡, 가설사무실·창고, 트럭크레인(10톤) 480HR 등

계 약 액(도급액) : 1,145,350,430원 (관급비 43,220천원, 이전비 91,130천원 별도)

계 약 자 : 미래건설기술(주) 대표 염일영

감독기관 : 서울특별시 시설관리공단

발 주 자 : 서울특별시 강서도로사업소

Ⅱ		변경내용

□ 공사비 변경

관련근거

- 시설관리공단 공사감독1처-2336(‘15.3.12) “설계변경 보고(정산)”

수량 증가 및 공종 등 추가

1) 중앙분리대 연석부 표면보수 및 경고도색 시행, 보도휀스 교체 등 - 작업지시

(‘14.12.24, 시설보수과-10280호 “현장 실정보고사항 검토 보고” 참조)

․ 중분대 연석부 콘크리트 표면보수 및 안전경고도색 : 당초 0 → 변경 296㎡

․ 중분대 상부덮개판 설치                        : 당초 0 → 변경  65m

․ 기존 중분대 상부덮개판 수밀코킹               : 당초 0 → 변경 533m

․ 보도부 휀스 교체(능형망→메쉬휀스)            : 당초 0 → 변경 130경간

2) 토공부 및 보도부 아스콘포장 물량조정, 관급자재 추가 구매 - 현장실측

(‘14.12.24, 시설보수과-10280호 “현장 실정보고사항 검토 보고” 참조)

․ 토공부 재포장 면적           : 당초 20.01 → 변경 20.88a (증 0.87a)

․ 보도부 재포장(방수포함) 면적 : 당초 10.00 → 변경 11.26a (증 1.26a)

※ 관급자재비(아스콘) 물량    : 당초   595 → 변경  610톤 (증 15톤)

3) 교면재포장((SMAT-CON) 물량조정 – 현장실측

(‘14.12.24, 시설보수과-10280호 “현장 실정보고사항 검토 보고” 참조)

․ 교면 재포장 면적      : 당초 2,156 → 변경 1,845㎡ (감 311㎡)

․ SMAT-CON 생산량   : 당초   215 → 변경   164㎥ (감   51㎥)

4) 공간비계 설치 물량조정 – 현장실측

(‘15.2.4, 시설보수과-985호 “현장 실정보고 검토 보고” 참조)

․ 바닥판 하면 공간비계 설치 면적 : 당초 1,725 → 변경 610㎡ (감 1,115㎡)

5) 토공부 중앙분리대 방호책(가드레일) 설치 - 작업지시

(‘15.2.4, 시설보수과-985호 “현장 실정보고 검토 보고” 참조)

․ 광명측 중분대 연석부 가드레일 설치 : 당초 0 → 변경 26경간 (관급구매-설치도)

․ 개봉측 중분대 토공부 가드레일 설치 : 당초 0 → 변경 21경간 (관급구매-하차도)

→ 토공부 방호책 21경간 (관급구매-하차도) 연장(L)=63m 시공비 도급비에 반영

6) 시․종점 토공부 옹벽구간 콘크리트 표면보수 - 작업지시

(‘15.3.9, 시설보수과-1852호 “현장 실정보고서 검토 보고” 참조)

․ 시점(광명측 A1) 토공부 좌우측 옹벽 : 당초 0 → 변경 231㎡ (야간작업)

․ 종점(개봉측 A2) 토공부 좌 측  옹벽 : 당초 0 → 변경  91㎡ (야간작업)

․ 종점(개봉측 A2) 토공부 우 측  옹벽 : 당초 0 → 변경  49㎡ (주간작업)

7) 보도부 가드레일판 도장 추가 및 트럭탑재형 크레인 작업일수 증가 - 현장실측

(‘15.3.9, 시설보수과-1852호 “현장 실정보고서 검토 보고” 참조)

․ 보도부 가드레일판 도장 면적 : 당초 300 → 변경 605㎡ (증 305㎡)

․ 작업차량 규격 : 당초 크레인(트럭) 10ton → 변경 트럭탑재형 크레인 3ton

․ 크레인 작업일수 : 당초 60일(480) → 변경 94일(752시간) (증 34일(272시간))

8) 공단 설계변경 심의 결과 반영

(‘15.3.12, 공사감독1처-2324호 “설계변경 심의결과 보고” 참조)

9) 기타 시공수량 증·감으로 인한 변경

주요 공종 수량 변경(증·감)

공 종	규 격	단위	수 량		증 · 감		비고
			당 초	변 경
SMAT-CON 생산	주간	㎥	215	164	감)	51
SMAT-CON 포설	주간	㎡	2,156	1,845	감)	311
절삭후 아스팔트덧씌우기	t=10㎝,불연속,야간	a	20.01	20.88	증)	0.87
차선도색(융착식)	백색실선, 15㎝	m	-	112	증)	112	신규
절삭후 아스팔트덧씌우기	교량,일시공량 10a이하	a	10.00	11.26	증)	1.26
교면방수-도막식(GUSS)	야간	㎡	755	811	증)	56
콘크리트 표면보수	EG프로텍터, 주간	㎡	1,671	1,758	증)	87
콘크리트 단면보수	EG프로텍터,t=30mm	㎡	23.6	48	증)	24.4
강관배관	STS, D150mm	m	448	471	증)	23
강재재도장	주간,철재면	㎡	300	605	증)	305
신축이음덮개판 설치	스텐레스,1000×1000×3t	개소	8	12	증)	4
중앙분리대 상부덮개판 설치	합성고무+스테인레스판	m	-	65	증)	65	신규
공간비계 설치	PSC,브램프,6개월	㎡	1,725	610	감)	1,115
메쉬휀스 설치	L2.0m×H2.0m	경간	-	130	증)	130	신규
가드레일 설치(중분대용)	W3.0m×H0.9m	m	-	63	증)	63	신규

공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비고
총 공 사 비		1,279,700,430	1,164,995,910	감	114,704,520
도급비	공 급 가 액	1,041,227,664	986,500,000	감	54,727,664
	부가가치세	104,122,766	98,650,000	감	5,472,766
	계	1,145,350,430	1,085,150,000	감	60,200,430
관급비		43,220,000	68,445,910	증	25,225,910	아스콘 가드레일
이전비		91,130,000	11,400,000	감	79,730,000	폐기물처리비

※ 예산과목 : (2014예산 사고이월) 도시개발특별회계, 도시안전실 교량안전과, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 개봉고가 보수공사, 시설비(401-01)

□ 공사기간 변경 : 없음

Ⅲ		검토의견

본 설계변경(정산)은 작업지시 및 현장 실정보고와 실측물량 정산에 따른 수량 증감 및 공종 추가에 따른 공사비를 변경하는 것으로 감독기관인 시설관리공단의 설계변경(정산) 보고는 타당한 것으로 판단됨

Ⅳ		조치계획

상기와 같이 설계변경(정산) 시행후 도급자로 하여금 재계약토록 조치하여 보수공사 마무리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 관련문서 각 1부.     끝.