투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철(주) 대표이사 귀하
(경유)
제목	우이~신설 도시철도 민간투자사업 공정관리 철저(5차)

1. 우이신설경전철(주) 우이(공사)제2015-199(2015.3.11.)호와 관련입니다.

2. 2014.10.22.일 26.5개월 공기연장 실시계획 승인후  위호로 상세공정계획을 제출하였는 바, 공사지연 발생시 실시협약 제8조 및 분쟁조정합의서 제1항에 따라 모든 책임이 귀사에 있음을 말씀드리며, 공사부진사항에 대하여는 실시협약 제23조(공정관리)에 따라 특단의 부진공정만회대책을 수립하여 준공기한 내 완공되어 시민불편 사항이 발생하지 않도록 강력한 의지로 공정을 관리하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤태권		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	03/16 이은상
협조자	주무관	임병길		주무관	위성환		주무관	안창호
주무관	임병관		경전철2과장	최광무
시행	도시철도사업부-2239	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울특별시 중구 청계천로8 (무교동96번지) 프리미어플레이스 빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7181	/전송	02-772-7305	/	yuntk@seoul.go.kr	/	대시민공개