문서번호	도로시설과-3202
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장	도시안전기획관
박용화	이앙식	이덕기	03/16 권기욱

2015년도 자동차전용도로(토공구간) 후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2015년도 자동차전용도로(토공구간)

노후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2015. 3

도시안전본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 자동차전용도로(토공구간)

노후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2015년도 자동차전용도로 노후포장 정비대상 구간에 대하여 현장 확인을 통한 적정성 여부 검토결과에 따라 정비계획을 수립․시행하여 자동차전용도로 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 자동차전용도로 포장 유지관리 현황

○ 노선 : 올림픽대로 등 12개 노선

○ 규모 : 연장 171.42km, 관리면적 6.2㎢

○ 그간 포장도로 유지보수 현황

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
면적(a)	1,327	2,831	1,691	523	1,502	1,211
예산(억원)	30	50	40	30	40	40

□ 사업개요(2015년)

○ 규    모 : 총 2,245a

- 노후포장정비 : 2,170a(9개 노선, 55개소)

- 소파보수 : 75a(13개 노선 전체)

노선	계	강변 북로	올림픽대로	노들길	서부 간선로	동부 간선로	양재대로	경부 고속	언주로	제물포길	소파 보수
개소	55	6	21	3	5	7	3	2	4	4
면적 (a)	2,245	183.6	729.8	51.6	110.2	469.4	207.1	173.3	210.8	34.8	75

○ 공사기간 : ‘15. 3 ~ 11

○ 소요예산 : 7,000백만원

○ 시행방법 : 서울시설공단 민간대행 사업으로 시행

※ 2014년 정비 실적 : 총 1,211a

구 분	계	강변 북로	올림픽 대로	노들길	양재대로	서부간선로	동부간선	경부고속	북부간선	소파보수
개소	36	10	6	7	4	4	2	1	2
면적(a)	1,211	240.8	197	191	189	107	100	16.8	15.2	154

□ 추진 경위

○ ‘15. 1. 20 ~ 1.28 : 13개 노선 현장조사(공단)

○ ‘15. 2. 10 : 포장 대상구간 현황 제출(공단→市)

○ ‘15. 2. 15 ∼ 2. 24 : 추가 현장조사(공단)

○ ‘15. 2. 25 ~ 2. 27 : 시, 공단 합동 현장조사 및 검토

□ 노후포장도로 정비 대상 구간 검토

○ 대상구간 선정 및 검토

- 1차 조사결과에 대한 보수깊이 선정을 위하여 코아 채취를 통한 균열깊이 판단 및 육안조사 합동점검 실시결과 공단 조사 구간 중 포장상태가 타 구간보다 다소 양호하여 소파 발생이 적을 것으로 판단되는 구간은 소파 보수 시행토록하여  노후포장 보수 물량 감소

∙ 당초 9개 노선, 55개소 2,311a ⇒ 변경 9개 노선, 55개소 2,170a

- 포트홀 응급복구부위 항구복구를 위한 소파보수 물량 반영

∙ 소규모포장보수 : 75a

○ 노선별 검토 결과

노선명	공단조사 결과		검토결과 (2015 시행계획)		증.감	비고
	개소	면적 (a)	개소	면적 (a)
9개노선	55	2,311	55	2,245	감) 141
강변북로	6	183.6	6	183.6	-
올림픽대로	21	867.2	21	729.8	감) 137.4
노들길	3	51.6	3	51.6	-
서부간선로	5	113.3	5	110.2	감) 3.1
동부간선로	7	469.4	7	469.4	-
양재대로	3	207.1	3	207.1	-
경부고속	2	173.3	2	173.3	-
언주로	4	210.8	4	210.8	-
제물포길	4	34.8	4	34.8	-
소파보수		75			-

○ 예산배정 검토

- 포트홀 발생 방지를 위하여 우기 전 노후개량 포장공사 조속한 사업추진을 고려하여 예산(70억) 일괄 배정 조치

□  향후계획

○ ‘15. 3. : 예산 배정, 계약심사 및 발주

○ ‘15. 4. : 공사계약 및 착공

○ ‘15. 6. : 소파 발생 예상 구간 우선 정비 완료

○ ‘15.11. : 공사 완료

첨 부 : 1) 2015년도 자동차전용도로 노후포장 정비구간 검토내역 1부.

2) 위치도 및 현황사진 1부.

3) 2015년도 포장도로 정비대상구간 조사현황 1부.

4) 위치도(전체) 1부.  끝.