문서번호	도로보수과-2566
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
최정필		이규철	03/16 임대성
협 조
	주무관			이한진
	주무관			이상하
	주무관			조용훈

‘15년 포장도로정비 직영공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부도로사업소

(도로보수과)

‘15년 포장도로정비 직영공사 추진계획

우리사업소에서 보유하고 있는 포장장비 및 공무직을 활용한 포장도로정비 직영공사를 체계적이고 집중적으로 시행함으로써 도로파손 예방 및 노후포장도로정비공사 예산 절감에 기여코자 함

추진방향

□ 직영 포장도로 정비공사 활성화를 위한 포장공사 전담 요일 운영

□ 포장공사 집중 실시일에는 가용한 모든 포장 장비 및 인력 활용

□ 직영공사 활성화를 통한 포장도로정비 예산 절감

장비 및 인력 현황

□ 포장장비 : 덤프트럭 외 10종, 총 17대

□ 직영반 인원 : 8명

□ 운 영 : 2개반 반별 4명

- 도로보수반 현황

구 분	반 장	반 원	담당지역	비 고
도로 1반	김종식	양춘서, 송병운, 박정승	마포,서대문,은평
도로 2반	최성주	양태근, 김진모, 유성민	중구,용산

직영반 운영현황

□ 각 부서별 민원사항 위주로 일일 작업지시에 따라 작업

○ 도로 소파보수, 도로(교통) 부속물 정비 및 파손 시설물 수거 등의    민원이나 순찰 적출사항을 당일 오전/오후 직영반 담당자가 반별    작업지시하여 긴급 보수작업 실시

□ 문 제 점

○ 부족한 인력(조종원, 공무직)으로 인하여 가용 장비 투입율 저조

○ 현 공무직 운영체제(도로보수 8명, 시설보수 4명)로는 중규모 이상    도로 정비(절삭 재포장)에 한계가 있음

○ 1개월에 2회(금,토,일) 터널청소 시행에 따른 조종원 및 건설기계

투입으로 도로정비(절삭 재포장)에 어려움이 있음

○ 조종원 연‧병가 및 전일 당직 근무시 해당 건설기계 투입 곤란

○ 직영 작업이 가능한 구간에 대하여도 도급공사 확대 시행

○ 일부 건설기계 내구년한 경과에 따른 잦은 고장 발생

· 노면파쇄기(2001), 롤러 2종(1984, 2001)

직영공사 포장정비 세부추진 계획

□ 도로정비 집중의 날 운영

직영공사 효율성 확보를 위해 매월 1, 3주 목요일을【도로정비 집중의 날】로 지정, 가용 인력 및 장비 집중 투입하여 포장도로 정비 시행

⇒ 시행기간 : 4.2~11.26(8개월,16일)

○ 평시 도로 소파보수, 민원사항 처리 등 긴급사항은 현행대로 시행

○ 중규모 이상 불량노면 재포장공사 확대 시행

- 교통량이 비교적 적은 노선을 직영공사 재포장 정비 대상으로 선정

- 도로정비 집중의 날에는 공무직 2개반을 합반하여, 포장공사 가용     인력 및 장비 집중 투입

□ 직영공사 정비대상

연번	위 치	규 모	정비일정	비고
1	은평뉴타운10단지앞~입곡삼거리 하행, 2차로(북한산로)	B=3.5m, L=2,500m A=87.5a	4월~9월
2	마포농수산물시장 ~ 성산대교 하행, 3차로(농수산물로)	B=4.0m, L=400m A=16.0a	10월
3	월드컵파크5단지사거리 ~LGCNS앞 (월드컵북로)	B=3.5m, L=130m A=4.5a	11월

○ 긴급공사를 제외한 터널 세척작업 등 도로정비 외 직영작업은 □도로   정비 집중의 날□ 일정과 겹치지 않도록 사전 조정

- 현장 투입인력(조종원, 공무직) 연가 사용 및 도로정비 외 작업에     건설장비 배차 가급적 지양

※ 직영공사 정비대상 노선 및 일정은 포토홀 발생건수, 직영반(조종원) 운영

등에 따라 탄력적으로 추가 또는 변경될수 있음

행정사항

□ 공사일정을 장비관리 부서(기전과)에 통보

□ 공사 계획에 대하여 관할 경찰서와 사전 협의 및 도로공사 신고

붙임 : 1) ‘15년 직영반 포장공사 대상 1부.

2) 포장작업 매뉴얼 및 교통처리 예시도 1부