문서번호	기전과-3239
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
양상규		03/16 박재경
협조
	주무관		박태진

『2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사』

설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.03

강서도로사업소

기 전 과

『2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사』

설계변경(정산) 보고

2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사에 대하여 시공사로부터 보험료 정산을 위한 설계변경(정산)서류가 제출되어 아래와 같이 검토하고 설계변경(정산) 시행코자 보고합니다.

관 련 근 거

〇 진흥전력설비(주) 진흥15-0313-081(2015.03.13.)

- 2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사 시행 설계변경 서류 제출

공 사 개 요

〇 공 사 명 : 2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사

〇 위    치 : 가마산지하차도 상부(구로구 가마산로 141)

- T-GIS교차로명 : 하늘공원주차장

〇 도 급 액 : 금1,475,100원

〇 공사내용 : 회전교차로 설치사업에 따른 차량지주 3본 철거

※ 교통신호기 설치사업은 구로구청 교통행정과에서 별도 시행

〇 공사기간 : 2014.11.21 ~ 2015.06.30

〇 시공업체 : 진흥전력설비(주)  대표 서정웅

설계변경 사유

〇 법정보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료) 정산

변경사항

〇 법정보험료(건강보험, 연금보험료, 노인장기요양보험료) 감 조치

(단위 : 원)

공 사 명	공사장소	순번	품 목	금 액	비 고
2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사	가마산지하차도 상부	1	건강보험료	16,399	감 41,493원
		2	연금보험료	24,020
		3	노인장기요양보험료	1,074

설계변경(정산) 금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증·감
공급가액	1,341,000	1,290,000	감 51,000
부가가치세	134,100	129,000	감 5,100
도 급 액	1,475,100	1,419,000	감 56,100

보고자 처리의견

〇 위의 변경사유와 같이 연금보험, 건강보험 등 법정보험료를 정산하는 사항으로,

〇 시공사가 제출한 설계변경사유서를 검토한 결과 적정하게 반영되었다고        사료됨으로 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경내역서 갑지 1부.

3. 설계변경내역서 1부.  끝.