투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 사항 알림【서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사】

1. ㈜삼보기술단 서남권(감) 제2015-85호(2015. 3.13.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행 중인『서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사』의 공사기간 연장에 따른 하도급 계약 사항이 변경되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급계약 사항

구 분	구 분 (하도급공종)	원도급자	하도급사	하도급 기간	도급액(원)	하도급액(원)	하도급율	비고
당 초	토공및구조물	대지건설(주) 신 상 길	(주)신영기초개발 임 완 혁	‘14.03.17 ~’15.02.28	2,405,700,000	2,494,800,000	103.70%
변 경	토공및구조물			‘14.03.17. ~‘15.06.30	변경 없음	변경 없음	103.70%

붙임 : 1. 하도급 변경계약 통보서 공문 1부.(별도 송부).

2. 건설공사의 하도급변경계약 통보서  1부 .(별도 송부).  끝.

	토목부장
주무관	이상근		교량건설과장	이동훈		토목부장	03/16 노우성
협조자
시행	토목부-5254	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2579	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개