문서번호	도시철도토목부-3252
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
신정		김상우	03/16 한동근
협조
	주무관		김승조

물가변동(4회)으로 인한 계약금액 및 공사구간 조정 검토보고(지하철9호선 920공구)

2015. 3.

도시철도토목부

물가변동(4회)으로 인한 계약금액 및 공사구간 조정 검토보고

지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 계약상대자인 롯데건설(주)에서 요청한 물가변동(4회)에 따른 계약금액 조정요청과 기 발주되어 있는 6차 공사에 대한 구간 조정 요청에 따른 검토 보고임

※ 조달청 예산사업관리과-373호(‘15.02.09) 및 벽산(엔)S159EGF24-0011호('15.03.13)와 관련임.

		사업개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 1,390.5m 【 개착 : 456m / 터널 : 934.5m 】

- 정거장 : L = 187.5m (공조기계실 22.5m)

- 터널 : L = 934.5m (단선병렬), 본선 : L = 149.6m (환기구 4개소)

○ 공 사 비 : 153,218백만원 (6차 : 25,800백만원)

○ 공사기간

- 총괄 : 2009. 12. 31 ~ 2015. 12 .29(변경없음)

- 6 차 : 2014. 02. 03 ~ 2015. 03. 17(변경없음)

○ 시 공 사  : 롯데건설(주) 외 1개사

○ 감 리 단 : 벽산엔지니어링(주) 외 3개사

		추진경위

○ 2014.10.17 :  제4회 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청 (시공사 → 본부)

○ 2014.10.27 :  조정 요청에 따른 검토 요청 (본부 → 감리단)

○ 2014.11.03 :  조정 요청에 따른 자료 제출 (감리단 → 시공사)

○ 2014.11.28 :  조정 보고서(4회) 제출 (시공사 → 감리단)

○ 2014.12.05 : 조정 보고서(4회) 제출 보완 요청 (시공사 → 감리단)

○ 2015.01.08 :  조정 보고서(4회) 검토의견서 제출(감리단 → 본부)

○ 2015.01.14 : E/S(4회)로 인한 계약금액조정 사전검토요청(본부 → 조달청)

○ 2015.02.09 : 총사업비 조정(E/S) 검토의견서 송부 (조달청 → 본부)

○ 2015.02.10 :  총사업비 조정(E/S) 조달청 검토의견서 통보 (본부 → 감리단)

○ 2015.02.11 : 총사업비 조정(E/S) 요청 검토결과 이첩통보(감리단 → 시공사)

○ 2015.03.12.  총괄3회 및 6차공사 2회 변경계약 요청(시공사 → 감리단)

		설계변경 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 괄	153,217,537	155,730,636	증)2,513,099	E/S
기시행	56,745,000	56,745,000	-
6차(2회)	25,800,000	25,800,000	-	E/S 및 구간 변경
장 래	70,672,537	73,185,636	증)2,513,099	〃

		총괄공사 변경

○물가변동에 의한 계약금액 조정 반영                     (단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
토 목	본선개착	11,385	11,385	-
	본선터널	30,395	30,395	-
	934정거장	20,739	20,739	-
	본선환기구	16,252	16,252	-
	기 타	2,658	2,658	-
	소 계	81,429	81,429	-
건 축		4,255	4,255	-
전 기		3,804	3,804	-
기 계 설 비		10,228	10,228	-
직접공사비계		99,715	99,715	-
제 경 비		28,849	28,849	-
설계비 외		12,519	12,519	-
물가변동	1회 물가변동	3,692	3,692	-
	2회 물가변동	4,416	4,416	-
	3회 물가변동	4,027	4,027
	4회 물가변동	-	2,513	2,513	총괄3회
	소 계	12,135	14,648	2,513
도 급 비		153,218	155,731	2,513

		6차 2회 변경

○ 물가변동 및 공사구간 조정 반영

1) 공사비                                               (단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
토 목	본선개착	1,401	1,401	-
	본선터널	8,971	8,971	-
	934정거장	4,438	4,253	(-)185
	본선환기구	1,071	890	(-)181
	기 타	573	573	-
직접공사비계		16,454	16,088	(-)366
제 경 비		4,374	4,341	(-)33
설계비 외		2,833	2,833	-
물가변동	1회 물가변동	639	572	(-)67
	2회 물가변동	763	682	(-)81
	3회 물가변동	737	669	(-)68
	4회 물가변동	-	615	615
	소 계	2,139	2,538	399
도 급 비		25,800	25,800	-

2) 공사구간조정                                          (단위 : 백만원)

구 분	구 간	공 종	단위	수 량			금 액	비 고
				당 초	변 경	증 감
6차 2회	본선개착	토공굴착	m3	15,772	15,772	-	-
		버팀보설치	본	90	90	-
	본선터널	굴진	m	523	523	-	-
	934정거장	구조물공	m3	18,739	16,536	(-)2,203	(-)185
		지열천공	공	6	6	-
	본선환기구	토공굴착	m3	12,208	12,208	-	(-)181
		어스앙카	공	199	199	-
		구조물공	m3	2,050	732	(-)1,318
	기타공사		식	1	1	-	-
	제 경 비		식	1	1	-	(-)33
	설계비 외		식	1	1	-	-
	물가변동(E/S)		식	1	1	-	399
	도 급 비		백만원	25,800	25,800	-	-

		설계변경 사유

○ 총괄 3회

- 제4회 물가변동에 의한 총괄 계약금액 조정으로, 조달청과 검토한 결과 지수조정율이 K=3.23%(기준시점: ‘12.01.01, 비교시점: ’14.09.01)로 산출되어, 물가변동금액(증 2,513백만원)을 총괄설계서에 반영.

○ 6차공사 2회

- 제4회 물가변동금액 변경(증 615백만원) 및 안전점검비, 퇴직공제부금비 등 간접공사비 변경에 따라 6차공사 공사물량을 구간조정 함이 불가피하므로, 934정거장 및 본선환기구 구조물공사 물량을 조정하였음.

		조 치 계 획

○ 조달청 검토의견을 반영하여 물가변동(2,513백만원)으로 증가된 공사비를 총괄 계약금액에 반영하고

○ 물가조정 및 공사중 여건변동에 따라 현재 진행중인 6차공사의 구간조정 필요성이 발생하여 감리단 검토의견과 같이 효율적인 예산관리와 잔여공사의 원활한 공사추진을 위하여 공사구간을 조정하고 계약금액 변경없이 설계변경하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

붙임  1)감리단 공문 1부

2)감리단 검토의견서 1부

3)시공사 공문 1부

4)총괄3회 변경설계서 1부

5)6차 2회 변경설계서 1부

6)6차 2회 변경현황도 1부

7)조달청 검토의견서 1부.  끝.