문서번호	건축부-2942
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
조민형		조영수	03/16 代강성욱
협조

「서울기록원 건립공사」       교통영향평가 용역 계획

2015. 3.

도 시 기 반 시 설 본 부

건축부

「서울기록원 건립공사」             교통영향평가 용역 계획

설계용역 중인 『서울기록원 건립공사』의 교통영향평가 용역 계획을 보고함.

1		사업개요

○ 대지위치 : 은평구 녹번동 산1-61 외2(구 질병관리본부내)

○ 지역/지구: 2종일반주거지역 / 지구단위계획구역(입안중)

○ 대지면적 : 8,998.0㎡

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적15,100.62㎡

○ 주 용 도 : 공공업무시설

○ 설 계 비 : 1,458백만원

○ 설 계 자 : ㈜해안종합건축사사무소 대표 윤세한 외5인

○ 설계기간 : ‘15.01.06 ～ ’15.08.27

2		추진사항

○ ‘14.03 ~ 04 : 중앙투융자심사 및 시의회 공유재산 관리계획 승인

○ ‘14.09.12 : 건축정책위원회 자문

○ ‘14.09.14 : 서울기록원 건립개선 계획(시장방침제243호)

○ ‘14.09.23 : 기술용역타당성심사(기술심사담당관)

○ ‘14.10.02 : 건설기술심의(용역발주심의)

○ ‘14.10.08 : 설계용역 시행계획 / 설계공모 공고

○ ‘14.12.18 : 설계공모 심사(당선:(주)해안종합건축사사무소)

○ ‘14.12.31 : 설계용역 계약

○ ‘15.01.06 : 착수계 제출

○ ‘15.01.20 : 착수회의 및 기본계획전문가 자문회의

3		용역 시행 방안

○ 관련근거

- 도시교통정비촉진법

- 교통영향분석 및 개선대책 수립지침(국토해양부 고시 제2012-140호)

○ 주요검토 내용

- 서울기록원 건립 주차이용계획

○ 용역 시행 방안

- 별도발주시 적격심사와 입찰에 따라 장기간 소요됨에 따라 설계용역 추진 일정에 맞추어 수의계약으로 용역계약 함.

※ 수의계약 관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한  법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제①항 5호 [추정가격 5,000만원 이하의 용역 계약]

- 지방자치단체 수의계약 운영요령 제3절(행정안전부 예규 제373호,   2011.09.14)

ㆍ용역․물품․기타 : 추정가격 2,000만원 이하(VAT 별도)

ㆍ지적정보처리장치 이용하지 않고 수의계약(1인 견적서 제출)

- 용역명 : 서울기록원 건립공사 교통영향분석 및 개선대책 수립 용역

- 용역수행자 : (견적서 제출 : 22백만원, VAT 포함)

㈜ 명인기술단  김철환

∙ 기본설계를 완료하는 시점에서 확정적인 설계를 위한 교통영향에 대한 조속한 설계 필요

∙ 인허가 부서인 은평구청과의 협의 등 조속한 의사결정 수행

- 소요금액 : 21,890,000원(VAT 포함)

※ 서울시 기술심사담당관-106749(2011.07.11)호에 의거 기술심사담당관실에 기술용역타당성심사를 요청 회신결과에 따라 확정된 금액으로 수의계약 추진

- 예산과목 : 부서)정보공개정책과, 정책)정보관리강화, 성과)기록관리체계구축, 단위)기록물시설관리, 세부)서울기록원건립, 통계목)시설비

4		향후 계획

○ 2015. 3 : 기술용역타당성 심사 의뢰(기술심사담당관)

○ 2015. 3 : 용역계약

○ 2015. 6 : 교통영향평가 분석 및 용역완료(제반절차 병행)

붙 임 : 견적서.  끝.