문서번호	토목부-5336
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목총괄과장	토목부장		시설국장
오열상	서관석	노우성		03/17 형태경
협 조	경리과장		허금도
	주무관		장기철

월드컵대교 건설공사 – 특수레미콘(강관속채움)

관급자재 계약기간(납품기한) 연기검토 보고

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

관급자재 계약기간(납품기한) 연기검토 보고

월드컵대교 건설공사에 소요되는 특수레미콘은 조달청 규격외 품목으로 별도   구매하여 사용하는 실정으로 ‘14년 기 구매한 레미콘의 잔량을 계약기간(납품 기한)을 연장하여 사용코자 보고하는 사항임.

- 특수레미콘 : 북단 IC 분류하수관로 보호 강관 속채움용 레미콘(19-60-150)

1	공사개요

○  공 사 명 : 월드컵대교 건설공사

○  개    요 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○  도 급 액 : 176,826백만원

○   공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2020.12.31.

○   시 공 사 : 삼성물산(주)외 2개사

○   감 리 사 : (주)포스코엔지니어링외 1개사

2	검토근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 물품계약 일반조건

○  관급자재(특수레미콘) 납품기한 연기 요청 : 월드컵(감리)2015-68호(2015. 3. 3.)

3	구매계약 및 납품현황

○ 계약건명 : 월드컵대교 건설공사 5차 특수레미콘 구매

○ 계 약 자 : 아주산업(주)

○ 계약번호 : 2014060452700

○ 계약일자 : 2014. 6.11.

○ 납품기한 : 2014.12.31.

○ 납품현황

품 명	규 격	단 위	납품요청수량			비고
			계약수량	기 사용 (‘14년)	잔 량
레미콘(특수)	19-60-150	m3	525	62	463

4	‘14년도 구매물량의 미 사용 사유

○ 강관속채움 공정을 위해서는 강관 주변 터파기 공사가 선행되어야 하나   당초 예상치 못한 폐기물 출현으로 조사 → 업체선정 → 대관신고 등   행정절차로 시험 터파기 구간외는 속채움공사 불가 → 잔량 발생

※ 분류하수관로 보호공 시공순서

① 말뚝항타 → ② 매립폐기물 처리 → ③ 터파기 → ④ 강관속채움 →

⑤ 역T형거더 거치 → ⑥ 되메우기 → ⑦ 슬라브 포장 및 부대공

5	계약기간(납품기한) 연기

○ 연기사유 : 사용시기 미 도래

- 당초 예상치 못한 매립 폐기물 출현으로 선행 공종지연→ 사용  기 미 도래

○ 납품기한 연기조치가 지연된 사유 : 당시 실무자의 착오로 연기조치 지연

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 : 미부과

○ 연기내역

품 명	규 격	수 량	납품기한		비고
			당 초	변 경
특수레미콘 (강관속채움)	19-60-150	463㎥	‘14. 6.11.~12.31.	‘14. 6.11.~’15. 8.22.

6	조치계획

○ 상기 사용잔량에 대하여 계약기간(납품기한) 연기조치 하여 공사시행에 만전을    기하고자함.

끝.