문서번호	기전설비과-1711
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	서대훈	박용철		03/17 고인석
협 조
	시설안전부장		강신재

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

2계열 시험운전 중간보고회 결과보고

2015. 3

생  산  부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

2계열 시험운전 중간보고회 결과보고

「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」2계열 시험운전 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

	중간 보고회 개최

Ⅰ

❍ 일  시 : 2015. 3. 9(월) 14:00~15:30

❍ 장  소 : 본부 4층 소회의실

❍ 참석자

- 본    부 : 부본부장, 시설안전부장, 기전설비과장, 고도정수반장                    각 업무담당

- 센    터 : 소장, 정수과장, T/F팀장

- 시공분야 : 도화엔지니어링 부사장 심만보, 삼성물산(주) 상무                    김병진, 책임사업관리자, 현장소장

- 보 고 자 : 시험운전 책임자 부장 배갑진

❍ 주요회의내용

- 시험운전 추진결과 및 고도정수처리시설 6월 통수계획 점검

- 2계열의 안정적 수질 및 시설용량(35만톤/일) 확보

	주요 보고 내용

Ⅱ

❍ 금회 시험운전 추진공정

구분	2015. 3. 9일 기준			비고
	계획(%)	실적(%)	대비(%)
시험운전	100	90	90

❍ 단계별 시험운전 추진실적

단계별	추진실적			주요추진내용 및 특이사항
	완료	진행중	미시행
무부하/부하운전	○
여과지 세척	○
1단계 연속부하 시운전	○
2단계 연속부하 시운전	○
수질시험		○		▪연구원에서 수질시험중
3단계연속부하 시운전		○		▪여과 지속시간 TEST
연속부하운전			○	▪정수생산 ▪대체급수(구의) 완료후시행

	주요 지시사항

Ⅲ

❍ 부본부장

- 6월말 까지 모든 시민에게 고도정수처리된 수돗물을 공급하겠다는 목표는 변할수 없으므로 공정관리를 철저히 하여주시고 매주 공정을 보고바람.

- 정수센터는 시험운전에 주도적으로 참여하여 주시고, 시설적측면과 운영적 측면에서 철저히 관리해 주시기 바람

❍ 생산부장

- 공사가 지연되고 있으니 오존 및 활성탄처리된 고도정수처리시설을 6월말까지 통수하기 위한 역공정 및 시험운전 추진계획을 보고바람

❍ 시설안전부장

- 6월 고도정수처리 통수는 오존+활성탄공정까지 마무리 할것

- 여과지속시간이 50시간에서 26시간으로 줄어들면 배출수지 용량에          문제가 있으니 검토 바람.

❍ 뚝도정수센터 소장

- 금회 시험운전 기간중 침전지 탁도가 PAHCs로 운영 결과 탁도가          1.0NTU 이상으로 상승하여 침전지 운전을 중지한것임

- 침전지 탁도 상승원인은 회수조 슬러지 영향보다는 2계열 침전지가 충격부하에 그만큼 취약하다 결과임

❍ 기전설비과장

- 통수까지 절대공기가 부족한 상황에서 아직도 오존융해주관이 반입되지 않고 있으므로 대책을 수립할 것

- 퇴수밸브 교체, 공사지연 등으로 시험운전이 정상추진되지 못하고 있으니 대책을 마련할 것

- 침전‧여과지 수질시험은 풀부하(35만톤/일)시 채수하여 시험 의뢰할 것.

	행정사항

Ⅳ

❍ 뚝도정수센터 시설현대화 시설공사 책임사업관리자는 지시       사항에 대하여 세부계획서을 수립 3. 18일까지 보고할 것.

- 고도정수처리시설 6월 통수를 위한 공정 및 시험운전계획

- 2계열 시설용량(35만톤/일)에 만족하는 시설보완 계획

- 여과지속시간 단축에 따른 물질수지 분석 및 배출수처리시설용량            검토결과

❍ 매주 공사 및 시험운전 추진 실적 보고.  끝.