문서번호	도로보수과-2559
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	03/17 조병준
협 조
	주무관			구희옥
	주무관			윤옥진
	주무관			이승행
	주무관			김동민

2015년 도로보수사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

강서도로사업소

(도로보수과)

2015년 도로보수사업 추진계획

우리사업소에서 유지관리하는 아스팔트 포장도로와 도로·교통시설물(맨홀, 노면표시 등)에 대하여 세부추진계획을 수립·시행하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성함으로서 시민불편을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		추진근거

〇 제설대책 추진에 따른 예산 재배정 통보【도로관리과-1888호(2015. 2. 5)】

〇 2015년 노후포장도로 정비(예산배정)계획 통보【도로관리과-2546호(2015. 2.17)】

Ⅱ		추진방향

〇 안전하고 쾌적한 도로⦁교통환경 제공으로 시불편 최소화

〇 철저한 품질관리 및 안전관리로 도로시설물 공용수명 연장

Ⅲ		도로 및 도로시설물 현황

〇 포장도로 : 51개 노선(연장 190.3㎞,  면적 5,730㎢)

〇 도로보부속 시설물

시설명	중앙분리대		미끄럼방지시설		방호울타리	충격흡수 시설	과속방지 시설
	개소	연장	개소	면적
개소	26	7,014	29	20,152	11,982	70	29

〇 교통안전시설

시설명	교통안전부속물				노면표시	표지병
	시선유도표지	시선유도봉	갈매기표지	반사경
개소	369	1,745	458	7	2,468km	33,447

Ⅳ		예산현황

□ 사 업 비 : 총 6건 11,363백만원

[1] 포장도로유지보수	:	7,379	백만원
- 노후포장도로 정비공사 (본청예산 : 338억원) - 포장도로 긴급복구공사(연간단가) (본청예산 120억) - 버스중앙차로 정비공사 (본청예산 36억) - 포장도로 예방적유지 보수 (본청예산 10억)		4,839 1,820 520 200
			백만원(재배정)
			백만원(재배정)
			백만원(재배정)
			백만원(예정)
[2] 도로굴착복구기금	:	2,000	백만원
- 굴착복구공사		2,000	백만원(재배정)
[3] 불량맨홀 정비 (본청예산 36억)	:	500	백만원(재배정)
[4] 노면표시 일상유지보수	:	680	백만원(재배정)
[5] 도로교통안전 부속물보수	:	494	백만원
- 도로부속시설물 - 교통안전시설물		400 94	백만원(재배정) 백만원(재배정)
[6] 제설대책 민간위탁	:	310	백만원(재배정)

Ⅴ		사업별 발주 및 추진계획

【2015년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)】

□ 사업목적

〇 시도 상에서 노후한 아스팔트 포장도로를 정비하여 시민불편해소 및 도로기능 회복으로 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(강서, 양천구 관내) 시도

〇 사업내용

- 절삭후 아스팔트덧씌우기 : 1,359a

- 소파 포장 복구 : 25a

- 노면표시 : 12,000m

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 2,940백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 3. 20 : 설계서 작성

〇 2015. 3. 27 : 계약심사요청(계약심사과)

〇 2015. 3. 30 : 공사발주

〇 2015. 4. 22 : 계약 및 착공

【2015년 노후포장도로 정비공사(강서2구역)】

□ 사업목적

〇 시도 상에서 노후한 아스팔트 포장도로를 정비하여 시민불편해소 및 도로기능 회복으로 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(구로, 영등포구 관내) 시도

〇 사업내용

- 절삭후 아스팔트덧씌우기 : 598a

- 버스전용차로 정비 : 189a

- 소파 포장 복구 : 25a

- 노면표시 : 10,000m

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 2,419백만원

※ 버스전용차로 정비 포함 : 520백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 3. 20 : 설계서 작성

〇 2015. 3. 27 : 계약심사요청(계약심사과)

〇 2015. 3. 30 : 공사발주

〇 2015. 4. 22 : 계약 및 착공

【관내 포장도로 일상유지보수공사(연간단가)】

□ 사업목적

〇 시도 상에서 노후하거나 파손된 아스팔트 포장도로를 정비하여 시민불편해소 및 도로기능 회복으로 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(강서, 양천, 구로, 영등포구 관내) 시도

〇 사업내용

- 절삭후 아스팔트덧씌우기 : 105a

- 소파 포장 복구 : 30a

- 노면표시 : 10,950m

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 1,820백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 2. 25 : 설계서 작성

〇 2015. 3.  2 : 계약심사완료

〇 2015. 3.  4 : 공사발주

〇 2015. 3. 28 : 계약 및 착공

【2015년 포장도로 굴착복구 공사(연간단가)】

□ 사업목적

〇 시도 상에서 시행되는 굴착공사에 대한 포장복구를 차로 단위로 시행하여 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(강서, 양천, 구로, 영등포구 관내) 시도

〇 사업내용

- 소규모 포장 복구 : 41a

- 차로단위 복구 : 296a

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 2,000백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 2. 11 : 설계서 작성

〇 2015. 2. 12 : 계약심사완료

〇 2015. 2. 13 : 공사발주

〇 2015. 3. 13 : 계약 및 착공

【2015년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)】

□ 사업목적

〇 시도(차도)상에 설치되어 있는 각종 맨홀 중에서 뚜껑면과 그 주변의 도로 포장면이 높이가 일치하지 않거나

〇 도로의 덧씌우기, 확포장 등의 공사로 높이조정이 필요한 경우 이를정비하여 포장면에 대한 평탄성을 유지함으로서 안전하고 쾌적한 통행여건이 이루어 질 수 있도록 도로환경을 조성하는데 목적이 있음

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(강서, 양천, 구로, 영등포구 관내) 시도

〇 사업내용

- 맨홀정비 : 약 500개소

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 500백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 3. 17 : 설계서 작성

〇 2015. 4.  6 : 계약심사요청(계약심사과)

〇 2015. 4. 10 : 공사발주

〇 2015. 5.  3 : 계약 및 착공

※ 신기술 활용 심의(기술심사담당관) : 2015. 4. 2일

【교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)】

□ 사업목적

〇 관내 교통안전시설인 노면표시를 신속히 정비하여 도로를 이용하는 시민 생활의 불편 및 안전사고를 예방하여 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(강서, 양천, 구로, 영등포구 관내) 시도

〇 사업내용

- 노면표시 신설 및 재도색 166,500m

- 노면표시 제거 10,000m

- 도로표지병 설치 및 제거 400개

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 680백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 2. 16 : 설계서 작성

〇 2015. 2. 25 : 계약심사완료

〇 2015. 2. 26 : 공사발주

〇 2015. 3. 17 : 계약 및 착공

【도로·교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)】

□ 사업목적

〇 관내 설치된 도로부속시설물(방호울타리, 미끄럼방지시설, 옹벽, 과속방지턱, 방응벽 등)의 유지관리를 통해 시민들의 불편사항 해소 및 안전사고를 예방하여 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

□ 사업개요

〇 위 치 : 사업소 관내(강서, 양천, 구로, 영등포구 관내) 시도

〇 사업내용

- 차량 방호울타리 정비 800m

- 충격흡수시설 정비 및 중앙분리대 보수

- 과속방지턱 신설 및 유지관리

- 방음벽, 시선유도봉, 미끄럼방지시설 등 유지관리

〇 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2015. 12.31

〇 사 업 비 : 494백만원

□ 세부추진일정

〇 2015. 3.  2 : 설계서 작성

〇 2015. 3. 13 : 계약심사완료

〇 2015. 3. 16 : 공사발주

〇 2015. 4.  6 : 계약 및 착공

Ⅵ		행정사항

〇 공사 발주전 계약심사 및 일상감사 의뢰

〇 2015년 노후포장도로 사업대상지 확정을 위해 기 선정된 구간 코어채취를‘2014년 포장도로 복구공사(연간단가-2구역)’업체에서 작업완료되어 검토후 포장두께를 결정코자 함.

- 14개노선 40구간 40점 코어채취

붙 임  사업별 담당자 지정현황 1부.  끝.