보    고    서

등록번호	시설관리과-7007

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	이생기	채재일	03/17 나태산

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015.   3.

복 명 자 : *************

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014-1 창신동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
개량-80	종로5가395-3	2015.3.04 ~ 3.14	2014.03.31	광장시장내 굴착위치 적재물 적치로 인해 공사가 불가 하기에 수요가와 적재물 제거 협의후 공사가능으로 준공 완료시까지 연기하고자 함.

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 수요가와 공사일정 재협의 후 공사완료시까지

작업연기 하고자 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.