문서번호	정수시설과-888
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	03/17 代유영준
협 조

2 배수정 전동기동반외 2개소 교체 계획

2015. 3.

뚝도아리수정수센터

(보수과)

2 배수정 전동기동반외 2개소 교체 계획
ㅡ

2배수정 전동기동반, 송수펌프 리액터 콘덴서 및 송수유량감시반 전기설비 노후도가 심화되어 고장이 잦아 안정성이 저하됨에 따라 전기설비를 개량하여 전기설비 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 정수시설과-1762(2014.7.23.) 사업 방침

□  뚝도 중앙제어실 일지(2015. 2. 22 ~ 23)

Ⅱ		교체 대상 현황

시 설 명	수량	설치년도	비고
2배수정 전동기동반	1면	2003년	내구연한 경과
기동리액터콘덴서반	2개소	2005년	내구연한 경과
송수유량계감시반	1면	2003년	내구연한 경과

※ 수배전반 내용년수 11년(조달청고시 제2011-18호)

Ⅲ		교체계획

□ 사업개요

- 2배수정 전동기동반 교체

- 송수 기동리액터 콘덴서 7호, 10호 교체

- 송수유량계 감시반 교체

□ 소요예산 : 60,000천원

- 예산과목 : 자본적지출,기계장치,정수장시설정비,시설비

□ 사업기간 : 2015. 3월 ~ 7월

Ⅳ		시행방법

□ 입찰방법 : 지명경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조 제10호에 의거 지명경쟁입찰에 의함

□ 지명업체 선정

- 중소기업제품촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조제1항에 의하여 직접생산 증명서를 소지한 업체로서 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제23조(지명입찰대상자의 지명)에 의한 전기공업협동조합에서 우수업체 5개사 이상을 추천을 받아 선정

□ 계약의뢰 : 본청 재무과(기술심사: 본부)

Ⅴ		향후 계획

□ 시술심사 : 2015.  3.

□ 계약의뢰 : 2015. 4.

□ 준    공 : 2015. 7.

붙임 :  1. 설계내역서 1부.

2. 시방서 1부.   끝.