투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(월드컵대교)

1. 토목부-5336(2015. 3.17.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 월드컵대교 건설을 위해 2014년(5차) 구매한 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기내역

품 목	계약자	납품기한		계약번호	계약체결일
		당 초	변 경
레미콘	아주산업㈜	2014.12.31.	2015. 8.22.	2014060452700	2014. 6.11.

나. 납품물량 현황

품 목	규 격	단 위	납품요청수량			비 고
			계약수량	기 사용 (‘14년)	연기요청 수량
레미콘	19-60-150	㎥	525	62	463

붙 임 : 관급자재 납품기한 연기보고 1부.  끝.

	토목부장
주무관	장기철		토목총괄과장	서관석		토목부장	03/17 노우성
협조자	주무관	오열상
시행	토목부-5370	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2546	/전송	02)3708-2599	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개