투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(921공구 책임감리용역 5차2회)

1. 도시철도토목부-3355(2015.03.17.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “지하철9호선3단계 921공구건설공사 전면책임감리용역“에 대하여 아래와 같이 변경(5차2회)계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역(5차)

나. 계 약 자 : ㈜ 유신   대표 박찬식

다. 용역개요 : 지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리(토목)

라. 변경사유 : 보조감리원 1인 미 투입으로 인한 비용 감소에 대한 당초 감리원수 감 조정에 따른 설계변경 및 과업수행기간 연장

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
용 역 비	768,939,000원	768,939,000원	변경 없음
용역기간	2014.04.02.~2015.03.18	2014.04.02.~2015.05.12	기간 연장

마. 예산과목 :

- 특별회계) 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선3단계건설, 시설비및부대비, 감리비.(760,000천원)

- 일반회계) 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진, 감리비(8,939천원)

붙임 : 1. 합의 각서 1부.

2. 변경 설계서(5차2회) 1부.

3. 검토 보고서 1부.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정성환		토목3과장	김상우		도시철도토목부장	03/17 한동근
협조자
시행	도시철도토목부-3361	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로231(예장동 산5-85)남산별관4층 서울시기반시설본부 도시철도국 토목부	/
전화	02-772-7235	/전송	02-772-7306	/	sunghawan@seoul.go.kr	/	대시민공개