문서번호	도로보수과-1058
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	성동도로사업소장
하승환	국중진	03/17 代홍영두

『'14~'15년 제설작업용역(장기계속)』

정산설계변경(전체2회, 2차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3. 17.

성동도로사업소

도로보수과

정산설계변경(전체2회, 2차1회) 검토보고

'14/'15년 제설대책관련 장기계속공사로 발주한 제설작업용역에 대하여 정산을 위한 설계변경 검토보고임

□ 용역개요

○ 용  역  명 : '14~'15년 제설작업용역(장기계속)

○ 총계약금액 : 금250,000,000원

○ 계  약  자 : 성심중기 대표 오정현

○ 총용역기간 : 2014. 11. 10. ~ 2015. 4. 15.

□ 보고내용

○ 용역기간 변경

- 전체분 : 변동없음(2014. 11. 10. ~ 2015. 4. 15.)

- 1차분 : 준공

- 2차분 : 변동없음(2015. 2. 16. ~ 2015. 4. 15.)

○ 설계 변경

- 전체분                                                 (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 용 역 비	250,000,000	211,600,000	감 38,400,000
도 급 비	250,000,000	211,600,000	감 38,400,000

- 2차분                                                  (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 용 역 비	68,450,000	30,050,000	감 38,400,000
도 급 비	68,450,000	30,050,000	감 38,400,000

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물유지관리, 제설대책추진, 시설비 및 부대비, 사무관리비(2015년 예산)

□ 검토의견

상기와 같이 정산을 위한 설계변경을 실시하여 원활한 『‘14/’15년 제설작업용역(장기계속)』 업무에 만전을 기하고자 함

첨  부  1) 설계변경내역서(전체2회)

2) 설계변경내역서(2차1회)

3) 제설용역 근무현황(2차분).  끝.