문서번호	토목부-5432
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	03/17 노우성
협조

도로 안전시설물 설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

도로 안전시설물 설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

강동경찰서로부터 본 공사장에 도로안전시설(충격흡수시설, 차량규제봉)설치 요청이 있어 이에 대해서 현장조사 및 검토한 내용을 보고하는 사항임.

※ 관련근거 : 강동경찰서 경비교통과–1427(2015. 2.11.)

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2015. 6.30.

◦ 도 급 비 : 18,242백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 위치도

【본선】

암사

대교

서원마을

암사

Ramp-B

암사

Ramp-C

암사

Ramp-C

암사

Ramp-H

암사

Ramp-E

암사정수장

중앙분리대 시점부

Ramp-C와 Ramp-H 분기점

본선과 Ramp-C

분기점

【정수장사거라~훈련원사거리】

아남아파트

대우아파트

강동 롯데케슬

강동 롯데케슬

정수장

사거리

범 례
충격 흡수 시설	기설계 유지
	신규 설치
시선 유도봉	기설계 삭제
	기설계 유지
	신규 설치

■ 관련규정 검토

◦ 따로붙임 검토의견서 참조

■ 감리단 검토의견

◦ 교통사고 예방을 위한 강동경찰서 요청에 의하여 본선도로 중앙분리대 시점부 및 본선 도로에서 올림픽대로 분기되는 램프 구간, 아남 · 대우아파트 진입로 화단분리대 구간에 대하여 추가로 충격흡수시설 및 시선유도봉 설치시 교통사고 예방에 유리할 것으로 판단되며

◦ 추가 수량에 대하여는 기계약단가를 적용코자 함.

■ 조치 의견

○ 상기 감리단 검토의견대로 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리 함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증)29백만원

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.