투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전( 실정보고 승인(사토장 변경, 본선11 상수도 이설))

1. 업무지시현장 : 강남순환도시고속도로 건설(4공구) 글로웨이 주식회사,

강남순환도시고속도로 건설(4공구) (주)서영엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2015-03-17 00:03:00

3. 지 시 내 용:

가. 서영감리15-63(‘15.3.9)호 및 서영감리15-71(’15.3.13)호와 관련입니다.

나. “토공도로 구간 발생하는 표토의 사토장 변경과 본선교각 P11. 소하JCT DownRamp P1에 저촉되는 상수도(관경 80~200mm, 연장 378m)이설” 에 대한 실정보고를 승인하니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 사토장 변경, 본선교 P11 상수도 이설 검토보고(용량초과 별송) 1부. 끝

주무관							시희식			도시고속도로과장					03/17 홍숭희
협조자
시행			토목부-5415									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지, 프리미어플레이스빌딩 12층)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-8662						/전송			3708-2599					/	shs9496@seoul.go.kr												/	대시민공개