문서번호	토목부-5338
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	03/17 노우성
협조
	주무관		유근평

가시설(복공판)에 미끄럼방지포장 시행 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

가시설(복공판)에 미끄럼방지포장 시행 검토보고

화물터미널 앞 지하차도 공사구간은 도로경사가 급하고 선형이 불량하여 우천시 및 노면 결빙시 대형 교통사고의 위험이 있어  가시설(복공판)에 미끄럼방지포장이 필요하여 검토 보고 드림

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (9차: 25,000백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7.31.(9차 `15.3.10.~`15.12.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

관련근거

❍ 동기강 2015-112호(`15. 3. 12.) 화물터미널앞 지하차도 미끄럼방지시설 승인 보고

❍ 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제29조(포장)

❍ 도로안전시설물 설치 및 관리지침(국토교통부 지침)

현 황

❍ 화물터미널 앞 지하차도 공사구간의 과천방향 도로 내리막 경사가 크고 곡선부 구간으로 가시설(복공) 설치로 인한 미끄럼방지포장이 필요한 실정임.

❍ 또한 복공구간의 교차로 및 횡단보도 접근부는 차량 제동을 위해 노면 마찰력 확보가 필요한 구간으로 미끄럼방지시설이 필요함.

미끄럼방지 포장계획

❍ 현 황 도

❍ 주요 공사 내용

구 분	형 상	수 량(㎡)	비 고
곡선부	전면처리	5,964
직선부	이격식(1-3방식)	832
교차로	전면처리	4,514
계		11,310

❍ 공사비 증･감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증･감	비 고
미끄럼방지시설	-	371,330	371,330
직접공사비	-	371,330	371,330
간접공사비	-	36,852	36,852
공급가액	-	408,182	408,182
부가가치세	-	40,818	40,818
총 공 사 비	-	449,000	449,000

조치계획

❍ 감리단 검토의견과 같이 승인· 통보하고 미끄럼방지포장 설치 비용은 우리 본부 설계변경소위원회 자문회의 거쳐 설계변경 시 반영하도록 조치하고자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.