문서번호	토목부-5446
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	03/18 노우성
협조

국도43호선 보도포장 재질변경 및 아천IC 교통영향분석비 검토보고

- 구리암사대교 건설공사 -

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

국도43호선 보도포장 재질변경 및 아천IC 교통영향분석비  검토보고

구리암사대교 건설공사 관련 국도43호선 보도포장 재질변경 및 아천IC일대 교통영향분석비 실정보고 사항에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06. 4. 5. ∼’15. 6.30.(15차 ’14.12.11.∼’15. 6.30.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 보고내용

○ 관련근거

- 암사감리 2015-134호(2015. 3.11.) ‘국도43호선 보도포장 재질 변경’

‣ 도시계획 실시계획인가 보완(동일한 보도재질로 재검토 : 소형고압 → 투수콘) 구리시 도시과 – 4623호(2015.5.1)

- 암사감리 2015-139호(2015. 3.12.) ‘아천IC일대 교통영향분석비 반영’

‣ 좌회전차로 및 평면교차로 교통영향분석후 협의 : 구리시 건설과-19417(2015.11. 5.)

‣ 교통영향분석 시행 승인 : 토목부 – 2197호(2015. 2. 4.)

구 분	〈국도43호선 보도포장 재질변경〉	〈아천IC일대 교통영향분석비〉
위치	국도43호선 (Ramp-K,L)보도	국도43호선 등 아천IC일대
내용	소형고압(8.2@) → 투수콘(8.2@)	교통영향분석비 반영
위치도

○ 소요사업비

- 국도43호선 보도포장 재질변경

(단위 : 천원)

구분		당 초	변 경	증·감	비고
포장공(A=8.2@)	소형고압→투수콘	12,510	16,603	증)4,093
직접공사비		12,510	16,603	증)4,093
제잡비		4,580	6,033	증)1,453
공급가액		17,090	22,636	증)5,546
부가세		1,710	2,264	증)554
소요공사비		18,800	24,900	증)6,100

※ 적용 단가 : 기계약단가 적용

- 아천IC일대 교통영향분석비

(단위 : 천원)

구분	견적가격			비고
	도화ENG	대경ENG	한국기술개발
교통영향분석비	58,100	71,500	77,000
협의율(85.367%)	49,600	61,000	66,000	부가세포함
적용	49,600	-	-

※ 적용 단가 : 3개업체 견적금액중 최저 견적가 × 협의율(85.367%) 적용

○ 감리 검토의견 : 도시계획실시계획 인가시 국도43호선 보도포장 재질 변경(소형고압→투수콘)사항 이행 및  아천IC 일대 평면교차 및 대기차로 규모 등 교통영향분석에 필요한 비용으로 설계 반영은 타당함.

□ 조치계획

○ 감리단 검토의견과 같이 보도포장 재질 변경은 구리시 도시계획실시계획인가시 보완 통보사항으로 기존 보도와 동일한 재질로 변경이 필요하며.

○ 아천IC일대 교통영향분석은 기 승인(토목부–2197호, ’15. 2. 4.)사항으로 교통영향분석에 필요한 비용은 추후 설계변경시 반영토록 조치.

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 2부.  끝.