문서번호	소방행정과-30720
결재일자	2013.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
담당자		조직경영팀장	소방행정과장		소방재난본부장
오재경		김윤섭	진준호		11/11 권순경
협 조
	인사팀장			지봉기

소방행정타운 건립 T/F팀 변경 운영계획

2013. 11.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

소방행정타운 건립 T/F팀 보강 운영계획

소방행정타운 건설비가 2014년 예산으로 편성됨에 따라 본격적인  사업 추진과 운영프로그램의 전문적인 구현을 위해 현재 운영 중인 T/F팀 구성원 등을 변경․보강하고자 함

Ⅰ		T/F팀 보강 개요

□ 명칭 : 소방행정타운 건립 T/F팀 →『소방행정타운 건립 추진단』

□ 추진단 구성원

구 분	변경 전	변경 후	비고
주관부서	소방재난본부(소방행정과)	좌 동
구 성 원	[4명] ○팀장 : 소방행정과 소방준감 진준호 ○총괄 : 조직경영팀 소방령 김윤섭 ○팀원 : 소방학교 소방장 유재열 ○팀원 : 소방학교 소방교 이주현	[6명] ○단장 : 마포소방서 소방정 조선호 ○총괄 : 영등포소방서 소방령 김두일 ○단원 : 성북소방서 소방경 최장근 ○단원 : 도봉소방서 소방위 정숙경 ○단원 : 소방학교 소방장 유재열 ○단원 : 1명(12.9.자 정원 배정일에 보강)	겸직근무 지원근무 지원근무 지원근무 지원근무 학교정원
추진기간	2013. 7월 정기인사 ～ 별도명령 시까지	2013. 11월 교류 인사시 ～ 별도명령 시까지
근무장소	소방재난본부(5층 회의실)	마포소방서 (필요시 소방재난본부로 이동)
근무방법	상근	상 근 (비상근 1명)

＊영등포소방서 소방령 김두일 : 비상근 근무 (2014. 1월 정기인사 시 상근전환)

□ 변경 사유

○ ‘14년 소방행정타운 사업비(153억원) 반영에 따른 본격적 사업추진(준비)

○ 부지조정, 소방관 추모공원․어린이교육관 건립 등 당면업무 해결방안 강구

○ 도시기반시설본부와 원만한 협조로 ‘14년도 설계․가설공사 완벽 추진

○ 기 연구 개발된 교육운영 프로그램(7개분야) 구체적 실현방안 보강

※ 중앙소방학교 및 중앙민방위방재연구원 이전 T/F팀 : 소방방재청에 구성(7명)

Ⅱ		주요업무 추진계획

일정별	주요 업무	비 고
‘13. 11월~12월	○ 시의회 공유재산관리계획(11월) ○ 부지조정, 추모공원 건립 등을 포함한 기본계획(방침) 수정 - 부지조정 관련 은평 뉴타운개발계획 확정 후 즉시 추진 - 설계 과업지시서에 포함될 단계별 사업내용 세분화 ○ 소방행정타운 현상설계 공모 준비(설계 지침서 및 가이드라인 등) ○ ‘14년도 예산반영 및 확정(12월) ○ 도시기반시설본부와 긴밀한 협조체계 유지로 사전협의 철저
‘14. 1~4월	○ SH공사와 부지매입비 협의 및 계약 체결 ○ 소방행정타운 현상설계 공모 발주준비(도시기반시설본부, 4개월) - 발주 기본계획 수립, 과업지시서, 기술타당성 심사 등 ○ 소방학교 교육운영 프로그램 연구 개발 지속 추진
‘14. 5~8월	○ 소방행정타운 부지 가설공사 계약 체결 ○ 소방학교 교육운영 프로그램 연구개발 결과보고 (시장님 보고) ○ 소방행정타운 현상설계 공모․선정 (도시기반시설본부, 4개월)
‘14. 8월 ～ ‘14. 12월	○ 기본설계 실시 및 소방행정타운 2단계 투자심사 ○ 실시설계 실시 및 ‘15년 공사 착수 준비 ○ ‘15년도 소방행정타운 1단계 사업비 예산편성
‘15~‘17년	○ 1단계 사업(소방학교․특수구조단 이전) 착공․완공

Ⅲ		행 정 사 항

□  건립추진단 지원근무 등 인사조치 (인사팀)

○ 일 자 : ‘13년 11월 교류 인사발령 시부터

○ 내 용 : 건립추진단 지원근무(5명) 등

연번	계급/성명	소속/ 직책	내용	비고
1	교. 이주현	소방학교 연구센터 연구원	T/F팀 지원근무 해제
2	령. 김두일	영등포소방서 현장지휘대장	‘14.1월 정기인사시 지원근무 조치 (상근으로 전환)	정기인사시까지 비상근
3	경. 최장근	성북소방서 행정팀장	지원근무 발령	보 강
4	위. 정숙경	도봉소방서 예방주임	소방학교로 전보 후 T/F팀 지원근무	교. 이주현과 교체
5	정원배정	소방학교 소방행정타운 전담요원	배정일자에 건립추진단 지원근무	‘13.12.9

□ 소방행정타운 건립 추진단 운영

- 소방행정타운 건립 추진단원 복무사항은 관련규정에 따라 추진단장의 책임 하에 시행할 것

․ 추진단원 초과근무는 지원 소속부서와 근무장소 간의 상이로 시스템상 지문인식이 불가함으로 수기처리

- 추진단 운영에 관한 세부사항은 주관부서장 및 추진단장 지시에 따라 수행.

- 추진단 운영관련 PC는 전산기획팀에서 추진단과 협의 후 지원 바람.  끝.