투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	2015년 서울대공원 예방사방 공사 및 감리용역 공사기간 변경요청

1. 총무과-3991(2015.3.16.) 및 4136(2015.3.17.)와 관련입니다.

2. 2015년 서울대공원 예방사방공사 및 시공감리용역 계약체결 건에 대하여착공(착수)일 및 준공기한 등을 아래와 같이 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

◎ 계약체결 현황

(단위 : 원)

구 분	2015년 서울대공원 예방사방 공사		2015년 서울대공원 예방사방 시공감리용역
	당 초	변 경	당 초	변 경
계 약 일	2015. 3. 17	2015. 3. 17	2015. 3. 16	2015. 3. 16
착 수 일	-	2015. 3. 23	-	2015. 3. 23
준공기한	2015. 5. 04	2015. 5. 12	2015. 5. 01	2015. 5. 12

끝.

	조경과장
주무관	김규희		주무관	김흔진		조경과장	03/18 이성주
협조자
시행	조경과-1450	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개