투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청 (노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계)

1. 재무과-57510호(2014.12.24.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계 용역

나. 용역개요

- 도로확장 폭4차로 → 6차로, 연장620m

‧ 수락고가 확장 : 폭4차로→6차로, 연장300m

- 노원교 연결램프 설치 : 폭5.25m, 연장143m

다. 계 약 자 : 동부엔지니어링(주), ㈜동일기술공사, ㈜정호이앤씨, ㈜피엔지

라. 준공기한 연기현황

구 분	용 역 비	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
전 체	278,190,000원	′12. 3.27	′15. 3.22	′15. 5.30	증)70

마. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 주민건의사항(수락고가 방음벽 설치) 반영을 위한 설계기간 부족

첨부 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		토목설계과장	이승우		토목부장	전결 03/18 노우성
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	토목부-5504	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개