문서번호	은평병원원무과-16100
결재일자	2013.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
유영환	전재용	오세양		11/12 남민
협 조

지하 기계실 배수로 보수공사

2013. 11.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

지하 기계실 배수로 보수공사

지하 기계실의 배수로가 물이 빠지지 않아 항상 정체되어 있어 악취발생 및 습기로 인한 기계의 부식이 우려되어 이에 배수로 보수공사를 시행하고자 함.

관련근거 : 2013년도 청사관리업무 추진계획

【원무과 - 917호(2013.01.22)】

추진경위

청사 지하 기계실의 배수로가 물이 빠지지 않아 항상 정체되어 있어 악취발생 및 습기로 인한 기계의 부식이 우려 됨에 따라 보수공사 시행

공사개요

공 사 명 : 지하 기계실 배수로 보수 공사

공사대상 : 지하 2층 기계실 배수로 70m 및 주변

공사기간 : 착공일로부터 20일

공사내용

- 기계실 배수로 보수공사

세부추진계획

지하 기계실 배수로 보수 공사

- 공사기간 : 2013.11.14. ~ 12. 3

- 공사내역

· 가설공사

· 배수로 바닥 철거

· 배수로 바닥 보수 : 70m

· 배수로(금속 트랜치) 커버 : 6m

공정계획(20일)

- 1일 : 가설 공사 등 현장 정리

- 2 ~ 4일 : 배수로 바닥 철거

- 5 ~ 6일 : 배수로(트랜치) 설치

- 7 ~ 8일 : 배수로 미장

- 9일 : 미장면 바탕처리

- 10 ~ 12일 : 우레탄 도장 및 양생

- 13일 : 배수로 커버 설치

- 14일 : 준공청소

- 15 ~ 20일 : 준공예정

소요예산 : 10,000천원

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진, 은평병원운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 공공운영비(100-201-02)

계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

행정사항

공사차량 출입협조 : 원무과

붙임 : 현행사진